	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재(이형철근) 납품기한 연기 요청(시립노원시각장애인 복지관 재건축공사)

우리본부에서 시행중인 『시립노원시각장애인 복지관 재건축공사』관급자재(이형철근)에 대한 납품기한을 아래와 같이 연기 요청합니다.

가. 관급자재 납품기한 연기 내역

계약번호 (납품요구번호)	품 명	규 격	단위	수 량	납 기 일		비고
					변 경 전	변 경 후
00126116901 (12-13-1- 06337-00)	철근	이형봉강(SD400) HD-10	ton	64.322	‘13.12.31	‘14.06.30
		이형봉강(SD400) HD-13	ton	43.605	‘13.12.31	‘14.06.30
		이형봉강(SD400) HD-16	ton	18.462	‘13.12.31	‘14.06.30
		이형봉강(SD400) HD-19	ton	5.288	‘13.12.31	‘14.06.30
		이형봉강(SD400) HD-22	ton	84.913	‘13.12.31	‘14.06.30
		이형봉강(SD400) HD-25	ton	44.804	‘13.12.31	‘14.06.30
		이형봉강(SD300) D-13	ton	2.034	‘13.12.31	‘14.06.30
		이형봉강(SD300) D-16	ton	1.000	‘13.12.31	‘14.06.30

나. 연기사유 : 관급자재 사용시기 조정으로 인한 납품기한 연기

따로붙임 : 관급자재 납품기한 연기 요청 관련서류 1부.  끝.

	건축부장
주무관	정재흥		복지시설과장	조영수		건축부장	05/15 이병석
협조자
시행	건축부-5930	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15. 2동 2층(서소문동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-2653	/전송	02)3708-2659	/	jjh5160@seoul.go.kr	/	부분공개(5)