투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	공사기간 변경 계약의뢰(시립노원시각장애인 복지관 재건축공사)

우리본부에서 시행중인 『시립노원시각장애인 복지관 재건축공사』의 공사기간(총차 및 1차) 변경 계약을 아래와 같이 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -

가. 계약건명 : 시립노원시각장애인 복지관 재건축공사

나. 공 사 비 : 2,982,036천원(총차), 2,463,587천원(1차)

다. 계 약 자 : 천마산건설(주)외 1

라. 공사기간 : 총차 : 2013. 01. 02 ~ 2014. 07. 01

(1차 : 2013. 01. 02 ~ 2014. 05. 16)

마. 변경내용(공사기간)

구 분	공사금액(원)	변경전 공사기간	변경후 공사기간	비 고 (공사기간)
총 차	#############	‘13.01.02 ~ ’14.07.01	‘13.01.02 ~ ’14.08.31	증)61일
1차공사	#############	‘13.01.02 ~ ’14.05.16	‘13.01.02 ~ ’14.06.30	증)45일

바. 변경사유 : 주관부서(운영자)의 설계변경 요청사항 반영에 따라 공사량 증가로 공사기간 연장이 불가피함.(※ 공사기간 연기에 따른 향후 이의 제기치 않기로 함)

따로붙임 : 1) 공사기간 변경검토 보고서 1부

2) 준공기한 연기의뢰서 및 각서 제출 각1부

3) 예정공정표(변경전,후) 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	정재흥		복지시설과장	조영수		건축부장	05/15 이병석
협조자	계약1팀장	김점선
시행	건축부-5938	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15. 2동 2층(서소문동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-2653	/전송	02)3708-2659	/	jjh5160@seoul.go.kr	/	부분공개