문서번호	산지방재과-4720
결재일자	2014.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		사면정비팀장	산지방재과장
유진석		조성만	05/15 정중곤
협조
	사무관		오승민

양천구 낙찰차액 사용승인요청에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5.

푸 른 도 시 국

(산지방재과)

양천구 낙찰차액 사용승인요청에 대한 검토보고

양천구에서 시행중인 2014년 예방사방사업 2건에 현장여건 변동에 따른 물량변경, 민원사항 반영 등으로 부득이하게 낙찰차액을 사용하고자 승인을 요청한 사항임.

1. 관련근거 : 양천구 공원녹지과-8368(2014.05.13)호와 관련임.

2. 공사개요 및 현황

○ 공 사 명 : 2014년 예방 사방공사(1공구)

• 공사기간 : 2014. 3. 28 ~ 5. 26

• 도 급 액 : 금166,392,000원

• 낙찰차액 사용금액 : 21,600천원

• 변경사유

- 현장여건 변동에 따른 물량변경과 민원사항 등으로 변경

구 분	설계변경내용	낙찰차액
제1구역 (갈산)	▶ 사면안정화를 위해 위험수목제거 : 39주 → 105주 ▶ 현장 여건에 맞춰 성토량 증가 : 성토 : 176m3 → 320m3 ▶ 석축쌓기 높이 및 물량 변경 : 115.5m(H1500) → 171.2m(H1300)	21,600천원
제2구역 (신정산)	▶ 사면안정화를 위해 위험수목제거 추가 : 11주 → 13주
제3구역 (지양산)	▶ 현장여건에 맞춰 석축 높이 변경 : 10m(H1500) → 20.3m(H500) ▶ 현장여건에 맞춰 계간수로 길이변경 : 46.3m → 47.2m ▶ 우수량을 감안하여 집수정규격 상향조정 ▶ 현장여건에 맞춰 식생토낭 높이 및 길이 변경 : 40m → 56.5m ▶ 작업구간 진입을 위한 수목이식 : 0주 → 300주 ▶ 사면 안정화를 위한 수목수량 변경 : 970주 → 1,590주 ▶ 사면 안정화를 위한 잔디식재 : 0m2 → 50m2

• 현황사진

계간수로 구간	사면 석축수로	사면정리 및 배수로

○ 공 사 명 : 2014년 예방 사방공사(2공구)

• 공사기간 : 2014. 3. 20 ~ 5. 17

• 도 급 액 : 금198,255,000원

• 낙찰차액 사용금액 : 42,161천원

• 변경사유

- 현장여건 변동에 따른 물량변경과 민원사항 등으로 변경

구 분	설계변경내용	낙찰차액
제1구역 (갈산)	▶ 기존 옹벽이 석축쌓기로 시공 되어 있어 낙석방지책 지주 고정을 위해 기초con′c 타설 20개소	42,161천원
제2구역 (양천중학교 뒤)	▶ 사면안정화를 위해 위험수목제거 추가 : 23주 → 64주 ▶ 유량에 맞게 수로 규격 및 수량 변경 - 계간수로A : 54.6M → 76.2M - 깬잡석 기슭막이 : 71.7→ 46M - 깬잡석 찰붙임 : 71.05M2 → 17.25M2 - U형 플륨관 : W300 32.8M → W400 139.8M ▶ 수로면이 급경사 지역으로 석축 상하부에 천단 및 기초 콘크리트 타설 198.4M ▶ 현장내 공분이 있어 수로 공사완료후 건널수 있는 목재덮개 1개소 ▶ U형 플륨관 시공구간 사면 안정화를 위해 식생토낭 설치 119.8M ▶ 위험수목제거 및 수로구간 주변 토사유실 방지를 위해 식재 - 화살나무 : 1,250주, - 조팝나무 945주, - 수크령 11,730본 ▶ 설계변경으로 자재 소운반 물량변경 등

• 현황사진

배수로 설치	식생토낭설치 및 식생구간	목재다리설치

3. 조치계획

○ 양천구에서 시행중인“2014년 예방사방사업”2건에 현장여건 변동에 따른 물량변경, 민원사항 반영 등으로 부득이 하게 낙찰차액을 사용하여 정비하고자 승인을 요청한 사항임.

○ 계획유량의 변경, 사면의 토사유실방지, 수로형태 변경에 따른 석축높이의  변경 등 현장여건과 민원사항 반영으로 시공물량이 변경되는 사항으로

○ 본 사업의 원활한 진행을 위하여 낙찰차액 활용 시공물량 정산에 만전을 기하고 공사기간 연장 없이 우기전에 완료될 수 있도록 통보코자 함.

붙임 : 1. 예산지원요청 공문 1부.

2. 감리 실정보고서 2부. 끝.