문서번호	산지방재과-4704
결재일자	2014.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		사면정비팀장	산지방재과장
유진석		조성만	05/15 정중곤
협조
	사무관		오승민

중랑구 낙찰차액 사용승인 요청에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5.

푸 른 도 시 국

(산지방재과)

중랑구 낙찰차액 사용승인 요청에 대한 검토보고

중랑구에서 시행중인 2014년 용마산 봉화산 예방사방사업에 주택가 안전을 위한 낙석방지시설설치 등 시공감리의 실정보고에 의거 낙찰차액 사용승인을 요청한 사항임

1. 관련근거 : 중랑구 공원녹지과-7142(2014.05.12)호와 관련임.

2. 공사개요

○ 공 사 명 : 2014년 용마산 봉화산 예방사방사업

○ 공사기간 : 2014. 3. 24 ~ 6. 1

○ 도 급 액 : 금268,180천원

○ 낙찰차액 사용금액 : 32,780천원

○ 변경사항 : 절개지 사면이 부분 보수토록되어 있으나 주택가 안전을 위하여 계획된 면적외 추가 낙석방지시설(낙석방지망)설치와 사면의 토사유실방지를 위한 녹화설치 등 정비

○ 현황사진

사면정비구간(낙석방지망설치)		사면식재구간

3. 조치계획

○ 중랑구에서 시행중인“2014년 용마산 봉화산 예방사방사업”에 주택가 안전을 위한 낙석방지시설 설치와 시설물설치로 인한 사면의 토사유실방지를 위해 녹화시설 추가로 낙찰차액 사용승인을 요청한 사항임.

○ 주택가 안전을 위한 암반사면의 추가 낙석방지시설이 필요한 상태이며, 시설물설치로 발생된 사면에 녹화시설을 설치토록 하고자함.

○ 본 사업의 원활한 진행을 위하여 낙찰차액을 활용 시공물량 정산에 만전을 기하고 공사기간 연장 없이 우기전에 완료될 수 있도록 통보코자 함.

붙임 : 예산지원요청 공문 1부. 끝.