문서번호	시설관리과-12939
결재일자	2014.5.16.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
김철수	최명익	전결 05/16 나태산
협 조

설계변경(3차) 심의위원회 개최결과 보고

(2013년 평창동 등 8개동 상수도공사)

2014. 05.

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

설계변경 심의자료

가. 공사명 : 2013년 평창동 등 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 제  목 : 설계변경심의

다. 일  시 : 2014. 5. 16.(금) 오전 11:00

#################

#########################

마. 공사개요 :

구 분	구 경	연 장	비 고 (증,감)
당 초	13~300mm	1,818m
변 경	13~300mm	947m	감) 871m

바. 공사기간 : 2013. 07. 23 ~ 2014. 06. 30

사. 공사금액 :

구 분	설계변경 현황			비고
	당 초	변 경	증 ․ 감
####	############	############	-

아. 설계변경 심의내용 : 별첨

설계변경 심의결과

1. 공사 현황

가. 공사명 : 2013년 평창동 등 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 공사개요 :

구 분	구 경	연 장	비 고 (증,감)
당 초	13~300mm	1,818m
변 경	13~300mm	947m	감) 871m

#####################################

#######################

2. 설계변경 사유보고

가. 공사중 물량 증.감 사항 발생

- 물량증가 : 아스팔트포장절단 100~150mm 적용 등 98개 공종

- 물량감소 : 토사소운반(인력상차) 등 58개 공종

나. 신공종 발생

- 동결토 터파기 등 4개 공종

다. 공종별 증감에 따른 변경

- 토공, 부설공, 포장공, 부대공 및 사급자재 증가

- 구조물공 감소

3. 설계변경 검토결과

가. 물량이 증.감한 일부공종에 대해 계약율을 적용

나. 도급액 범위내에서 물량변동

다. 신공종에 대해 낙찰율을 적용

붙 임: 설계변경내역서 1부.  끝.