	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	건설폐기물 처리용역 변경계약(제1회, 준공) 요청(월계2교외1개소 교량확장)

우리부에서 시행 중인 『월계2교외 1개소 교량확장공사 건설폐기물 처리용역』의 설계변경(제1회, 준공)에 대하여 변경계약을 요청합니다.

1. 용 역 명 : 월계2교외 1개소 교량확장공사 건설폐기물 처리용역

2. 용 역 비 : 금13,650,000원

3. 용역기간 : 2013.05.20 ~ 2014.05.19

4. 용역업체 : ㈜동성 임희향, 서울N.E.T.(주) 안성효

5. 예산과목 : 도로계획과, 도로건설, 간선도로망 확충(도시개발특별회계), 월계2교외 1개소 확장공사, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01) (2014년 예산)

6. 설계변경 내역                                             (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
용 역 비	13,650,000	19,110,000	5,460,000	내역변경
용역기간	′13.05.20~′14.05.19	′13.05.20~′14.05.19	-

첨부 : 1. 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서(제1회, 준공) 1부.

3. 합의각서  1부.  끝.

	토목부장
주무관	박웅교		도시고속도로과장	성선주		토목부장	05/16 노우성
협조자	경리과장	최영미
시행	토목부-9441	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-8664	/전송	3708-2599	/	pkyo2425@seoul.go.kr	/	대시민공개