투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	「동물탈출방지 휀스설치사업 실시설계 용역」 기간 연장 시행(2차)

「동물탈출방지 휀스설치사업 실시설계 용역 』에 대하여 아래와 같이 과업기간을 연장 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 동물탈출방지 휀스설치사업 실시설계 용역

나. 위   치  : 동물원 외곽순환로변 5km구간

다. 과업내용 : 동물탈출방지휀스설치, 보안출입문, 동물포획울타리 등

라. 도 급 자 : (주)에코텍엔니어링 대표 김현규

마. 계약금액 : 21,120천원

바. 과업 기간 연장

○ 당   초 : 2014.3.10 ~ 2014.5.20

○ 변   경 : 2014.3.10 ~ 2014.6.09(20일 연장)

사. 연장사유

○ 설계용역 보고회 의견사항 반영 및 서울시 계약심사 등 철차이행 등에 추가 일수가 소요되어 과업기한을 연기코자 함.

○ AI로 인한 재휴장에 따라 현장방문 일정 등이 지체되었음

아. 예산과목

○ 공원이용시민 만족도 향상, 동물건강증진 및 종보전, 동물사 관리기능

및 야생동물 종보전, 공원 안전시설 보수 및 정비, 시설비

붙임 : 준공기한 연기 의뢰서 1부.  끝.

주무관	오맹렬		주무관	김흔진		조경과장	이성주		관리부장	05/19 정상택
협조자
시행	조경과-2736	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기 과천시 대공원광장로 102(막계동) 서울대공원 조경과	/	http://grandpark.seoul.go.kr/
전화		/전송	02-500-7993	/		/	대시민공개