문서번호	토목부-9552
결재일자	2014.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		도시고속도로과장		토목부장
김구		성선주		05/19 노우성
협 조
	주무관				양준식

-강남순환도시고속도로 8공구 건설공사-

건설폐기물 준공기한연기 검토보고

2014. 5

도시기반시설본부

토 목 부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

건설폐기물용역 준공기한연기 검토보고

(강남순환도시고속도로 8공구 건설공사)

「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 제15조제1항 및 시행령 제11조」에 의거 분리 발주하여 시행중인 강남순환도시고속도로 8공구 건설공사 건설폐기물 처리용역에 대한 공기연장 사유가 발생함에 따라 처리방안을 검토하여 보고 드림

※ 관련근거 : 동기공 2014-1705호(2014.05.14.)

용역 개요

❍ 용 역 명 : 강남순환도시고속도로(8공구) 건설폐기물 처리용역

❍ 계 약 자 : ㈜동보이앤시  대표 김지환

❍ 계약금액 : 금1,721,781천원(3차 : 금200,000천원)

❍ 용역기간

- 총 괄 : 2004.04.20. ~ 2014.07.29.

- 3 차 : 2014.02.03. ~ 2014.05.30.

폐기물 처리량 및 용역비 현황

구 분	예산(천원)	수 량(톤)			비 고
		폐아스콘	폐콘크리트	계
총 괄	1,721,781	85,957	32,468	118,425
1차 (기 준공)	129,000	7,700	2,000	9,700
2차 (기 준공)	100,000	2,516	4,500	7,016
3차 (금 회)	200,000	9,403	4,000	13,403
장 래	1,292,781	66,338	21,968	88,306

준공기한 연기 검토

❍ 용역기간 변경 내용

구 분		용역비	착공일	준공예정일	비 고
총괄	당 초	1,721,781,000	2004. 04. 20.	2014. 07. 29.
	변 경	1,721,781,000	2004. 04. 20.	2018. 07. 31.
	증･감	-		증 1,463일
3차	당 초	200,000,000	2014. 02. 03.	2014. 05. 30.
	변 경	200,000,000	2014. 02. 03.	2015. 02. 28.
	증･감	-		증 274일

❍ 준공기한 연기사유

- 강남순환도시고속도로 8공구 본공사 준공기한 연기에 따른 용역기간 연장

※ 준공기한 연기검토 보고 [토목부-7383호(2014. 4.17.)]

❍ 연기 귀책소재 : 시행청

❍ 지체상금 부과 : 미부과

조치계획

❍ 본공사 준공기한 연기됨에 따라 폐기물처리 용역기간 연장

- 총괄 : 2014.07.29. → 2018.07.31.

- 3차 : 2014.05.30. → 2015.02.28.

❍ 본공사에 맞춰 용역기간 조정하고 본 사항에 대해 도급자에 통보하여 폐기물

처리용역 변경 계약하고자 합니다.

【붙임】 1. 감리 검토의견서 1부.

2. 설계내역서 1부.  끝.