함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	작업기한 연기요청 회신

1. 공사감독2처-6616(14. 5.15.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 작업기한 연기요청한 사항을 아래와 같이 검토하고 회신 하오니 공사기한내에 작업이 완료될 수 있도록 공사장 안전관리 및 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

작업 지시	공 종	작 업 기 한		현황 및 문제점	연 기 사 유 (시설관리공단)	사업소 의견
		당 초	변 경
소화전 신설1	소화전신설	2014. 4.30. ~5.16.	2014. 4.30. ~2014. 5.30.	굴착승인지연으로 인한작업공기 절대 부족	굴착승인지연으로 인한작업공기 절대 부족	시설관리공단의 작업기한 연기요청 의견대로 시행토록하고 민원이 발생되지 않토록 공사장 안전관리에 철저를 기할 것.
소화전 신설2	소화전신설	2014. 4.30. ~5.23.	2014. 4.30. ~2014. 5.30.

끝.

							강서수도사업소장
주무관							강은영			시설관리과장					전결 05/19 이자원
협조자
시행			시설관리과-10501									(						)		접수											(						)
우																					/
전화		3146-4005						/전송			3146-4039					/													/	대시민공개