다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	설계변경시행(준공) 및 계약의뢰(본관 청사 휴게공간 조성 공사)

『본관 청사 휴게공간 조성 공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행(준공)하고자 하오니, 계약에 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 본관 청사 휴게공간 조성 공사

나. 계약업체 : ㈜파란아이엔디 #########

다. 계약기간 : 2014. 5. 7 ~ 2014. 05. 21

라. 변경사유 : 계약 물량변경에 따른 금액 정산

마. 변경내역

구 분		금 액(원)			비고
		당초	변경	증감액
총 공 사 비		19,403,000	18,293,000	-1,110,000
도급비	공급가액	17,639,091	16,630,000	1,009,091
	부가가치세	1,763,909	1,663,000	-100,909
	계	19,403,000	18,293,000	-1,110,000

붙임  1. 보고서  1부

2. 정산설계서  1부. 끝.

	총무과장
주무관	박교관		시설관리팀장	최석기		총무과장	05/19 오형철
협조자
시행	총무과-13434	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 세종대로110	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송	(02)731-6219	/	urban927@seoul.go.kr	/	부분공개(6)