보고서(급수공사연기)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
남상욱	김태형	05/19 안재엽
협 조

문서번호 :	급수운영과-11293

광진구상수도공사 감독업무 수행중 ############ 수요가로부터 급수공사 연기 요청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

2014. 05. 19.

보고자 : #######################

제목 : 급수공사 연기 보고

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2013년 광진구 상수도공사(2차) 연간단가

연번	주소	수요가명	공사기간	지시번호	비고
1	##############	#### #####	2014.05.09.~05.19.	신설-151

□ 연기요청사항

연번	주소	수요가명	연기요청 사유	공사연기 기간
1	##############	#### #####	일정 협의(신축현장 개인하수도 병행 협의 지연)	2014.06.13

□ 검토결과

○ 상기 위치에 대하여 수요가 요청에 의한 일정 재협의로 공사기간 내 공사가 어려워 공사기간을 아래와 같이 연기하고자 합니다.

연번	주소	수요가명	당초 공사기간	변경 공사기간
1	##############	#### #####	2014.05.09.~05.19.	2014.05.09.~2014.06.13.

□ 귀책사유 : 동부수도사업소

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

첨부 : 공사연기 요청서 1부(따로붙임).  끝.