투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	2013년 교통사고 잦은곳 개선 교통신호기 공사(2차) 설계변경(2차) 시행

2013년 교통사고 잦은곳 개선 교통신호기 공사(2차)에 대하여 아래와 같이 설계변경(2차)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 2013년 교통사고 잦은곳 개선 교통신호기 공사(2차)

2. 공사기간 : 2013.12.06 ~ 2014.05.24

3. 도 급 자 : (주)에이텍파워 대표 이고운

4. 설계변경내역                                                           (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비고
공급가액	92,627,091	89,962,682	감 2,664,409
부가가치세	9,262,709	8,996,268	감 266,441
도 급 액	101,889,800	98,958,950	감 2,930,850

5. 설계변경 사유 : 계약물량 변경사항(증,감) 반영 및 보험료 등 정산

6. 예산과목 : 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리 강화,                                  교통사고 잦은곳 개선, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01).

붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.  끝.

주무관	양상규		기전과장	박재경		강서도로사업소장	05/19 이규상
협조자	주무관	박태진		주무관	한영호		주무관	윤신식
계약1팀장	김점선
시행	기전과-6151	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 양천로237(마곡동 67-1)	/
전화	2657-7969	/전송	2657-7939	/	ysg007@seoul.go.kr	/	대시민공개