문서번호	총무과-13414
결재일자	2014.5.19.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
박교관		최석기	05/19 오형철
협조

- 본관 청사 휴게공간 조성 공사 -

준공정산 설계변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 05.

- 본관 청사 휴게공간 조성 공사 -

준공정산 설계변경 보고

본관 청사 휴게공간 조성공사 시행중 변경된 물량에 대하여 아래와 같이 준공 정산하고자함.

공사개요

공 사 명  :  본관 청사 휴게공간 조성 공사

공사기간  :  2014. 5. 7 ~ 2014. 05. 21

계약금액  :  금19,403,000원(금일천구백사십만삼천원정)

계약업체  :  ㈜파란아이엔디 대표자 #####

주요 변경내용

물량변경 내역 및 사유

- 4층 탕비실 싱크대 상하부장 1개소 미설치 : 890,000원 정산

※ 탕비실 사용부서(어르신복지과) 의견 수렴 내용 반영

변경금액

구 분		금 액(원)			비고
		당초	변경	증감액
총 공 사 비		19,403,000	18,293,000	-1,110,000
도급비	공급가액	17,639,091	16,630,000	1,009,091
	부가가치세	1,763,909	1,663,000	-100,909
	계	19,403,000	18,293,000	-1,110,000

검토의견

물량변경에 따른 정산 내역 조정·검토 결과에 의거 1,110,000원이 감액된 18,293,000원으로 설계변경(준공정산) 하고자 함.

따로붙임 정산설계서 1부.  끝.