문서번호	물재생과-1779
결재일자	2014.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
홍민표		강병수	05/20 채희정
협조
	주무관		이재수

토목시설물 유지보수공사 작업지시 계획(1차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 05

중랑물재생센터

물재생과

토목시설물 유지보수공사 작업지시 계획(1차)

센터내 토목시설물 해빙기 안전점검시 지적된 지하관랑(3처리장) 벽체누수, 횡단스틸그레이팅(4처리장) 파손, 2소화조 주변 콘크리트포장 파손 및 침하, 장안유수지 복개박스 출입구 개방에 따른 안전철책 설치, 남문 진출입로 외측 좌우 경계울타리 부분 파손에 대하여 정비·보수를 시행하여 센터내 시설물 유지관리 및 안전대책에 만전을 기하고하 함.

1		공사개요

가. 공 사 명 : 토목시설물 유지보수공사(연간단가)

나. 도 급 액 : 173,326천원

다. 시 공 사 : 정석티엠에스(주) 대표 김영선

라. 공사기간 : ‘14. 05. 07 ~12. 31.

2		보고내용

가. ‘14년 해빙기 시설물 교차점검시 지적된 제3처리장(B계열, 생오니밸브#12), 지하관랑내 벽체누수, 제4처리장(송풍동 진입도로) 배수로 그레이팅 파손, 제2소화조 바닥침하로 시설물내 안전사고 발생 우려로 긴급한 보수가 요구되며,

나. 센터내 시설물 안전점검 지적된 장안유수지 박스 출입통제 안전철책 설치 및 남문 진출입로 외측 노후 좌우 경계울타리 정비·보수하여 센터내 주요 시설물내 출입통제를 강화하여 안전대책에 만전을 기하고자 함.

다. 보수정비 내역

연번	위 치	현 황	공사내역	비 고
1	#3처리장B계열 (생오니펌프#12앞)	벽체누수	ㆍ벽체누수 부위 보수 (B=50mm, L=5m)	해빙기 안전점검 지적사항
2	#4처리장(송풍실 진입도로)	배수로 그레이팅 파손	ㆍ무소음 스틸그레이팅 및 앵글교체 600*1000mm, L=6m	해빙기 안전점검 지적사항
3	#2소화조	주변바닥침하	ㆍ바닥 콘크리트 포장	해빙기 안전점검 지적사항
4	장안유수지박스	박스내 출입통제 안전시설미비	ㆍ안전철책 설치 1개소 (SUS소재, 6000*2000mm)
5	남문 진출입로	좌우 경계울타리 노후	ㆍ 울타리교체(23개소) 및 녹제거·방청페인트 도포 (L=100m)

라. 작업기간 : 2014. 05. 21 ~ 06. 25.

3		조치계획

가. 위 정비공사를 우선 시행토록 연간단가계약 업체에 작업지시하고, 소요 공사비에 대하여는 실비를 초과하지 않는 범위내에서 반영 정산처리코자 합니다.

나. 예정공사비 : 28,000천원

- 경계울타리 정비(교체 및 페인트도표) : 15,000천원

- 유수지 게이트 설치(잡철물제작) : 6,000천원

- 콘크리트 포장 : 5,000천원

- 기타 부대공사 : 2,000천원

붙 임 : 현황사진 1부.  끝.