문서번호	도시철도토목부-5537
결재일자	2014.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
노권호		김성호	05/20 이은상
협조

지하철 9호선 2,3단계 건설공사

주간 공정회의 결과보고(5월 넷째주)

2014.05

도시철도토목부

지하철 9호선 2․3단계 건설공사 주간 공정회의 결과보고

서울지하철 9호선 2․3단계 건설공사에 대한 공구별 주간공정 추진사항
보고 및 현장 지시사항에 대한 결과를 보고드림.

□ 일 시 : 2014.5.19(월)  10:30(2단계), 16:00(3단계)

□ 장 소 : 도시철도토목부 회의실

□ 참석자

〇 본부 : 도시철도토목부장, 토목1~3과장, 궤도과장, 업무담당

〇 현장 : 915공구~923공구 책임감리원, 현장소장(현장대리인)

□ 회의내용

〇 공구별 주간공정 추진사항 보고

〇 본부와 현장과의 소통 ⇨ 건의사항 및 애로사항 청취

□ 현장 지시사항

〇 926정거장 상수도관 누수관련 펌프용량, 집수정용량등 적정여부를 재검토

하여 보고바람(915공구)

〇 2단계 구간 출입구 E/S는 제작공장 및 반입일자 등을 체크하여 차질이

없도록 하고 후속공정 추진등 공정관리에 만전을 기할 것

〇 코엑스사거리 소화전, 상수도관 1,500mm 이설관련 사항은 유관기관

협의 및 계획을 본부에 보고해 주기 바람(916공구)

〇 2단계 구간 개구부(출입구, 환기구 등)는 추락방지등 안전사고예방

관리철저

〇 916공구는 집수정내 본양수기를 조속히 설치하여 수해예방에 만전을

기할 것

〇 916공구 본선터널 체수구간은 물고임이 없도록 조속히 조치할 것

〇 917공구는 환승통로 공사구간 계획공정에 차질이 없도록 철저히 관리

토록 하고 930정거장 되메우기는 심도가 깊으니 층다짐을 실시하여

침하방지에 만전을 기할 것

〇 2단계 구간 포장복구는 단계별 층다짐 철저히 하고 현 시방기준에

맞춰 시공토록 할 것(표층변경 등 #78 ⇨ #67)

- 차선점용시 출퇴근 시간대에 공사를 지양하고, 불가피한 경우

본부 승인을 득한후 시행토록 할 것

〇 사고발생시 단계별 비상연락 철저 및 유관기관 비상연락망을 카톡에

올려 유관기관 협조를 신속히 취할 수 있도록 할 것(전공구)

- 단계별 비상연락 : 현장 ⇨ 공사관리관 ⇨ 담당과장 ⇨ 도시철도토목부장

▸ 공사관리관은 상황 판단후 사고내용을 안전관리과에 보고

- 현장별 카카오톡에 공사관리관, 담당과장, 도시철도토목부장을 초대하여

사고처리 진행사항 정보공유

〇 3단계 쉴드터널 구간은 세그먼트 균열원인 확인 및 보수보강등 대책을

강구하여 보고할 것

〇 강우시 현장 우수의 흐름상태를 점검하여 물고임 지역 확인 및 하수

시설물 이상유무를 확인하여 조치토록 할 것(전공구)

〇 각 공구에서는 준공기한내 공사를 완료하여 지체상금이 부과되지 않도록

공정관리에 만전을 기해주기 바람(전공구)

〇 현장 안전 및 시공관리 철저로 부실벌점으로 인한 불이익을 받지 않도록

현장관리에 만전을 기할 것. 등(전공구)

□ 행정사항

〇 지시사항은 공구별 책임감리원에게 통보하여 이행토록 조치

□ 공정회의 사진

(9호선 2단계)                       (9호선 3단계)