보고서(급수공사연기)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
최호림	김태형	05/20 안재엽
협 조

문서번호 :	급수운영과-11428

광진구상수도공사 감독업무 수행중 ######### 외 3건 수요가로부터 급수공사 연기 요청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

2014. 05. 20.

보고자 : 직  지방시설주사보   성명 : 최 호 림

제목 : 급수공사 연기 보고

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2013년 광진구상수도공사(장기계속단가계약)

연번	주소	수요가명	공사기간	지시번호	비고
1	#############	###	2014.05.16.~2014.05.23.	신설-162	신축
2	###################	###	2014.05.13.~2014.05.22.	개량-37	폐전
3	####################	###	2014.05.13.~2014.05.22.	개량-38	폐전
4	##############	###	2014.05.15.~2014.05.22.	개량-39	폐전

□ 연기요청사항

연번	주소	수요가명	연기요청 사유	공사연기 기간	요청인
1	#############	###	신축현장 타공정 지연에 따른 연기	2014.05.30	###
2	###################	###	재건축 철거 폐기물 적치로 인한 굴착지연으로 연기	2014.05.30	###
3	####################	###	재건축 철거 폐기물 적치로 인한 굴착지연으로 연기	2014.05.30	###
4	##############	###	재건축 철거 폐기물 적치로 인한 굴착지연으로 연기	2014.05.30	###

□ 검토결과

○ 상기 위치에 대하여 신축현장 및 인입관폐쇄 공사현장의 자체 시공지연으로 공사기간 내 공사가 어려워 공사기간을 아래와 같이 연기하고자 합니다.

연번	주소	수요가명	당초 공사기간	변경 공사기간
1	#############	###	2014.05.16.~2014.05.23.	2014.05.16.~2014.05.30.
2	###################	###	2014.05.13.~2014.05.22.	2014.05.13.~2014.05.30.
3	####################	###	2014.05.13.~2014.05.22.	2014.05.13.~2014.05.30.
4	##############	###	2014.05.15.~2014.05.22.	2014.05.15.~2014.05.30.

□ 귀책사유 : 동부수도사업소

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

첨부 : 공사연기 요청서 4부.(따로붙임) 끝.