문서번호	시설과-1786
결재일자	2014.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설과장
최지효	홍순철	05/20 변규열
협 조
	공원운영과장		이상용

『보라매 무장애 친화공원 조성공사 폐기물 처리용역』

변경 정산 검토 보고

2014. 5.

동부공원녹지사업소

(시  설  과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

『보라매 무장애 친화공원 조성공사 폐기물 처리용역』

변경 정산 검토보고

우리사업소에서 추진 중인 『보라매 무장애 친화공원 조성공사 폐기물 처리용역』과 관련하여 현장 여건에 맞추어 처리하고 아래와 같이 변경 정산 보고드림

Ⅰ		용 역 개 요

용 역 명 : 보라매 무장애 친화공원 조성공사 폐기물 처리용역

용역기간 : 2012. 12. 20 ~ 2014. 5. 20

도 급 비 : 8,010,000원

도 급 사 : ㈜좋은세상과환경 대표 김석영

Ⅱ		변 경 내 용

변경사유 : 목재데크쉼터 보수 및 판석 재활용 등으로 폐기물 물량 변경

구분		단위	당초물량	변경물량
운반비	폐콘크리트	㎥	112.028	121.446
	건설폐기물	㎥	24.899	14.268
	혼합폐기물	㎥	1.543	9.458
처리비	폐콘크리트	ton	257.914	279.549
	건설폐기물	ton	64.577	36.372
	혼합폐기물	ton	0.876	5.467

변경내역 : 당초 8,010,000원 → 변경 7,923,830원 (감 86,170원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
총공사비		8,010,000	7,923,830	-86,170
도급비	공급가액	7,281,819	7,203,482	-78,337
	부가가치세	728,181	720,348	-7,833
	계	8,010,000	7,923,830	-86,170

Ⅲ		처 리 의 견

「보라매 무장애 친화공원 조성공사」와 연계한 폐기물 처리용역으로 현장여건에 맞추어 처리하고 계약부서에 변경(정산) 요청하고자 함.

끝.