문서번호	설비부-5361
결재일자	2014.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
이재홍		김창균	05/20 박기형
협조

『서남권 글로벌센터 개보수 전기공사』관련 관급자재(LED조명등) 납품기한 연기보고

2014.  5.

도시기반시설본부

[설  비  부]

『서남권 글로벌센터 개보수 전기공사』관련

관급자재(LED조명등) 납품기한 연기보고

『서남권 글로벌센터 개보수 전기공사』 관급자재인 LED조명등의 설치시기가 건축공사 일정상 미도래되어 납품기한 연기에 대한 검토 보고임.

계약현황

[건 명 : 서남권 글로벌센터 개보수 전기공사 LED다운라이트 설비]

품 명	납품기한	계약금액(원)	계약업체	비고
LED조명등(4종)	2014.05.30	28,693,000	대한민국상이군경회

보고내용

○ 납품기한 연기

공 종	납 품 기 한		비 고
	당 초	변 경
LED조명등(4종)	2014.05.30	2014.07.23	계약금액 변동없음

○ 연기사유 : 건축공사 추진일정에 따른 설치시기 미도래

○ 지체상금 부과 여부 : 미부과

조치의견

○ 상기 관급자재 납품기한 연기 의뢰(건설총괄부).

붙임  1. 납품기한연기 합의서 1부.

2. 물품구매목록 1부.  끝.