문서번호	시설과-3473
결재일자	2014.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
이동헌		남상국	05/20 함석주
협조

예방사방사업(예장동, 이화동)

준공기한 연기 검토 보고

2014. 5.

중부공원녹지사업소

시설과

예방사방사업(예장동, 이화동)

준공기한 연기 검토 보고

예방사방사업 추진중 안전조치를 위한 추가 물량 발생 등 현장여건에 따라 공사기간을 연장하고자 검토 보고드림.

□ 공 사 개 요

공 사 명 : 2014년 예방사방사업(예장동,이화동)

공사기간 : 2014. 3. 17. ~ 2014. 5. 25

도 급 비 : 223,586천원

도 급 자 : 산오름(주) 대표 권민정

공사내용 : 측구수로, 보막이 등 설치, 암반사면정비 등

□ 준공기한 연기

연기기간

- 당  초 : 2014. 3. 17 ~ 2014. 5. 25

- 변  경 : 2014. 3. 17 ~ 2014. 5. 30

연기사유 : 예방사방사업(예장동,이화동) 공사범위 확대 및 추가 안전조치 등 사업물량 증가로 인한 절대공기 부족

지체상금 부과여부 검토

- 연기사유 귀책소재는 중부공원녹지사업소, 지체상금은 미부과

□ 보고의견

상기와 같이 준공기한을 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

첨부 : 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.