문서번호	토목부-9755
결재일자	2014.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
이한규	최광무	05/21 노우성

자전거도로 휀스 규격변경 실정보고 (선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5.

도시기반시설본부

(토 목 부)

자전거도로 휀스 규격변경 실정보고

(선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사)

자전거도로 휀스 당초 설계는 W1,700 × H1,000으로 되어 있었으나, 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(2012.02)이 만들어짐에 따라 매뉴얼 기준적용에 따른 규격변경 실정보고 임.

□ 관련근거

○ 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(2012.02)

□ 공사개요

○ 위    치 : 강동구 암사동 440-1 ~ 고덕동 165-11(아리수로)

○ 사업규모 : 아리수로 도로확장 3.7km, 폭 2차로 → 4, 6차로

○ 사업기간 : 2009. 1.06. ~ 2014.12.31.

○ 총사업비 : 115,048백만원 (도급액:35,444백만원)

○ 시 공 사 : ㈜대저건설외 1사

□ 자전거도로 규격변경 개요

구 분	당 초	변 경	비고
이미지			(H:1.20m 상단 가로보 최상부까지)
규 격	W1,700 × H1,000	W2,000 × H1,280
재 질	지주 : 스틸 가로보 :알미늄 합금 주물	전체 : 스틸+분체도장

□ 추진경위

○ 2008.10.15 : 서울 디자인위원회 심의 의결(2008년)

- 컨셉트: 빗살 무늬의 연속 패턴을 이용 특정거리 이미지 강조

○ 2011.10.28. : 고덕뒷길 자전거도로 설치변경 협의에 대한 회신

(보행자전거과-110481,2011.10.28.)

- 당초 휀스 설치 위치: 자전거도로가 보도가 아닌 차도에 계획돼 있었으며, 휀스설치는 이면도로 접속부(L=12m)에 계획됨.

○ 2012. 6.27. : 자전거도로 관련 합동회의(감리단 사무실)

- 시공방안 협의(서울시 보행자전거과, 강동구청 도로과, 도시기반시설본부)

- 회의결과: 주택가측은 안전확보 위해 설치, 산지측은 제외

○ 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(2012.02) 제정

▷ 펜스 높이는 1.2m (노면에서 상단 보의 최상부까지 높이)로 한다.

▷ 가로보는 3단 이상으로 하며, 보호레일을 1.1m 높이에 설치할 수 있다.

▷ 기타사항은 본 매뉴얼의 안전시설(도로안전시설)의 내용을 준용한다.

□ 보고내용

○ 실정보고 이유 : 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(2012. 2) 기준 적용에 따른 규격변경

○ 제품선정 사유 : 본 제품의 컨셉의 빗살무늬 형태의 제품은 ㈜디엔테크에서 만생산되며, 최초 설계시부터 반영되어 있었음.

○ 수량 증·감 : 변동 없음

공 종		단위	당 초	변 경	증감	비고
교통안전시설공	자전거도로휀스	m	1,689	1,689	0

○ 단가검토

- 상기제품(W2000xH1280mm)이 2014년 2월 제조사가 나라장터(조달청)에 등재시킨 가격이 경간당 440,000원(현장 설치도, 부가세포함)으로 조사되었으며, 경제성과 재질의 특성을 검토한 결과 조달청에 등재된 규격 및 가격 적용이 합당함

- 조달가는 제3자 단가로 관급자재 납품시 적용되는 가격으로 해당 자재가 사급자재로 계약되어 있고 ㈜디엔테크에서 협의율 100%를 요구함.

- 단가비교표                                   (부가세 별도, 원/m)

구 분		최초 실정보고	조달청	물가정보 (2014.03)	비 고
자전거 도로휀스	지주 재질	스테인레스	스틸	스테인레스
	단가(원/M)	235,000 (252,534)	200,000 (200,000)	285,000 (302,534)	()는 설치비 포함
	협의율 적용	212,839 (228,718) 협의율 90.57%	200,000 (200,000) 협의율 100%	258,124 (274,005) 협의율 90.57%
	채택		○

○ 공사비 검토                                            (단위 : 원)

구 분	수량	당 초		변 경		증 · 감	비고
		단가	금액	단가	금액
자전거도로 휀스	1,689m	161,299	272,434,011	200,000	337,800,000	65,365,989
제 잡 비	1 식		20,565,989		17,200,000	- 3,365,989
소 계			293,000,000		355,000,000	67,000,000
부 가 세	1 식		29,300,000		35,500,000	6,200,000
도급공사비			322,300,000		390,500,000	68,200,000

□ 검토결과

○ 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼 기준 적용에 따른 자전거도로 휀스규격 변경(W1700xH1000 → W2000xH1280)이 필요함.

○ 선사유적지 컨셉의 빗살무늬 형태의 제품은 조달청에 등재된 제품(설치비 포함)이 있어 등재된 단가로 적용

○ 공사계약 일반조건 Ⅵ.공사설계의 변경 1.설계변경 “가‘’ 항목중 4)발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우에 해당됨

○ 공사의 시급성을 감안하여 변경된 형식을 현장에 적용하여 우선 시공코자 하며, 증액되는 공사비 68,200천원에 대하여는 설계변경 심의를 거쳐 결과에 따라 추후 설계변경에 반영하고자 함.

붙 임 : 1. 감리단 검토의견서 1부.

2. 관련규정 1부. 끝