문서번호	건축부-6228
결재일자	2014.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		의료시설과장	건축부장
신현성		장윤수	05/21 이병석
협조

장충체육관 리모델링공사 건설폐기물 처리용역

용역기간 연장검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부

장충체육관 리모델링공사 건설폐기물 처리용역

용역기간 연장검토 보고

『장충체육관 리모델링공사』건설폐기물 처리용역의 용역기간 연장에 대해 책임감리원으로 부터 요청이 있어 기간 연장 검토 보고.

1		사업개요

○  공 사 명 : 장충체육관 리모델링공사

○  대지위치 : 중구 장충동2가 200-102

○  규    모 : 지하2층/지상3층, 연면적 11,429㎡

○  용    도 : 문화 및 집회시설(체육관)

○  공사기간 : 총차 : 2012. 05. 30 ~ 2014. 08. 31

○  공 사 비 : 11,017,069,000원

○  시 공 자 : 성지건설(주)

○  감 리 자 : 펨코엔지니어링 건축사사무소

2		추진사항

○ 2010. 10. 06 설계용역시행 - 본부장방침 제333호

○ 2011. 12. 21 설계용역준공

○ 2012. 03. 27 감리용역 계약 및 착수

○ 2012. 05. 30 공사계약 및 착공

○ 2014. 05. 14 공사기간 연장검토 보고(책임감리원 → 건축부)

3		용역기간 연장

○ 근  거

1). 지방자치단체 용역계약 일반조건 제7절 2.계약기간의 연장

2). 공사변경계약체결통보서(20120#######05) 장충체육관 리모델링 공사(1차)

3). 용역계약통보서(20130#######02) 장충체육관 리모델링공사            건설폐기물 처리용역(2차)

○ 사유 및 검토내용

행정제1부시장 방침 376호[체육진흥과-10873(13.09.09)호] 관련, 시설    안전강화 및 미관개선, 관람객 편의시설개선, 공연인프라 확보, 지붕재 개선    등으로 인한 설계기간 추가소요로 공사기간 연장계약이 체결(2014.01.02.)    되어 건설폐기물 처리용역을 공사기간에 맞추어 연장하고자 함.

○ 용역기간 연장 내역

구 분		당 초	변 경	비 고
총차	기간	11.12.26~14.06.02	11.12.26~14.08.31	(증)90일
	금액	332,397,200원	332,397,200원	변경없음
2차	기간	13.02.16~14.06.02	13.02.16~14.08.31	(증)90일
	금액	112,794,200원	112,794,200원	변경없음

- 용역기간 연장 귀책기관 : 서울시

4		감리 검토 의견

○ 건설폐기물처리용역(2차) 기간연장에 대해 적정성 검토결과 건설폐기물  처리기한은 공사계약기간인 14.08.31까지(+90일)로 공기연장하는 것이 적정하다고 사료됨

○ 건설폐기물 처리용역 공사기간연장으로 인한 물량 및 금액증감 없음.

5		처리 의견

○ 책임감리원의 의견과 같이 폐기물처리 용역기간 연장 하고자 함.

따로붙임  1. 폐기물처리용역 공기연장 요청(SJT-2014-0514-1)공문 사본 1부

2. 당초 용역계약통보서(20130#######02) 장충체육관 리모델링  공사 건설폐기물 처리용역(2차) 계약서 사본 1부.  끝.