문서번호	방재시설부-3425
결재일자	2014.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	방재시설부장
김상용		박희천	05/21 박종웅
협 조
	조경시설과장			신용우
	주무관			임성은

마곡지구내 재생수공급시설 설치공사

조경석쌓기, 외부난간설치, 철근고재처리 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5.

도시기반시설본부

(방재시설부)

마곡지구내 재생수공급시설 설치공사

조경석쌓기, 외부난간설치, 철근고재처리 검토보고

“마곡지구내 재생수공급시설 설치공사” 상부슬라브를 복토조성(조경마운딩) 하도록 되어있으나, 출입구 주변은 장비반입을 위한 차량이 접근하도록 진입로를 시공하여야 하므로 복토사면의 안전성 및 미관을 고려한 조경석 쌓기외 2건에 대한 실정보고에 대한 검토 보고임.

관련근거

○ 도화(서남마곡)2014-55호(2014.05.19) 『실정보고(조경석 쌓기, 외부난간, 철근고재)』

공사개요

○ 위    치 : 서울시 강서구 마곡동 91일대(서남물재생센터 內)

○ 규    모 : 재생수 생산시설 Q = 20,000㎥/일

○ 사업기간 : 2011. 11. 01 ~ 2016. 07. 31

○ 도 급 비 : 6,868백만원

○ 시 공 사 : 유호산업개발(주)

○ 감 리 사 : (주)도화엔지니어링, (주)유신

실정보고내용

○ 변경사유

① 상부슬라브 전체를 복토조성하여 조경식재를 하여야 하나 출입구 주변 법면부는 사면안정 및 미관을 고려하여 현장에서 발생한 발파암을 유용하여 조경석 쌓기로 변경하고, 공사장 진출입로 설치 및 유출관로 매설 구간은 기존 조경석 철거 및 쌓기를 반영

② 계단실상부 캐노피 및 자재반입구, 외부 환기구의 단부구간에는 추락방지를 위해 안전난간을 설치하되, 복토 후 공원화로 인한 미관을 고려하여 인접 테니스장 상부 난간과 동일한 적삼목 난간을 설치코자 함

③ 구조물공사에 사용된 철근자재의 할증(3%~6%) 수량(약 73톤)에 대하여는 고재처리비를 내역에 감액조치

○ 변경내역

(단위 : 원)

구 분	물 량		개략공사비(원)			비고
	당 초	변 경	당 초	변 경	증 감
1. 직접공사비			2,738,752	13,154,754	(+)10,416,002
토공	- 유용토(연암) 운반 - ㎥	- 유용토(연암) 운반 64 ㎥	-	271,808	(+)271,808	기존 단가
조경공	- 조경석 쌓기 - ton - 조경석 철거쌓기 - ton - 잡석 부설 - ㎥ - 부직포깔기 - ㎡	- 조경석 쌓기 165ton - 조경석 철거쌓기 69.2ton - 잡석 부설 45㎥ - 부직포깔기 210㎡	-	19,872,420	(+)19,872,420	신규 단가
	- 외부난간설치 - m - 외부난간기초 - 개소	- 외부난간설치 92 m - 외부난간기초 30개소	-	16,234,546	(+)16,234,546	신규 단가
	- 정원석 놓기 26.7ton	- 정원석 놓기 - ton	2,738,752	-	(-)2,738752	기존 단가
사급자재비	- 잡석 - ㎡ - 고재처리 - ton	- 잡석 48㎡ - 고재처리 73.359 ton	-	-23,224,020	(-)23,224,020	신규 단가
2. 제 경 비			1,606,248	12,090,246	(+)10,483,998	VAT 포함
3. 도급공사비			4,345,000	25,245,000	(+)20,900,000
4. 관급자재비	- 레미콘25-18-8 - ㎡	- 레미콘25-18-8 2㎡	-	111,450	(+)111,450
총 공 사 비			4,345,000	25,356,450	(+)21,011,450

검토 및 조치계획

○ 현장에서 발생된 발파암을 유용하여 출입구주변 조경석을 쌓기와 공사장 진출입로 개설 및 유출관로 매설로 인한 기존 조경석 철거ㆍ쌓기, 계단실 상부 캐노피 및 자재반입구, 외부 환기구 단부 추락방지를 위한 안전난간 설치, 철근의 할증수량에 대한 고재처리비를 반영코자 하는 본 실정보고에 대하여 책임감리원의 검토의견이 적절하다고 판단됨으로 감리단 보고내용과 같이 실정보고 사항을 승인코자 함.

붙임 : 책임감리원 검토의견서 1부. 끝.