문서번호	도로시설과-9051
결재일자	2014.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	한강교량팀장	도로시설과장
전봉재	하현석	05/21 이용심

한강교량 일상유지 보수공사 전면책임감리용역

감리수행 실태 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시안전실

(도로시설과)

한강교량 일상유지 보수공사 전면책임감리용역

감리수행 실태 점검결과 보고

한강교량 일상유지 보수공사 전면책임감리 수행 실태 점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 한강교량 일상유지보수공사 전면책임감리용역(장기계속)

○ 용역기간 : 2014. 4. 10. ~ 2017. 4. 3.

- 1차 : 2014. 4. 10. ~ 2015. 3. 5.

○ 도 급 자 : ㈜대한콘설탄트, ㈜신명건설기술공사

□ 점검개요

○ 점 검 자 : 한강교량팀장 하현석, 권미애

○ 일    시 : 2014. 05. 12.(월)

○ 장    소 : 감리원사무실(용산구 이촌동)

○ 목    적 : 한강교량 일상유지 보수공사 책임감리 업무수행 실태

점검을 통해 당 공사의 견실한 공사시행과 예산의 적정 집행을 도모하고자 함.

○ 점검내용

- 시설물 보수 시공계획서 검토 적정성

․ 시방 기준, 설계서 및 도면, 산출내역서 부합 여부 확인

․ 현장 조건에 부합 여부 및 실제 시공가능 여부 확인

- 감리원 업무일지 작성 상태

․ 공사 위치 및 시공방법, 검측결과, 민원 사항 등 작성 여부 확인

□ 점검결과

○ 시공계획서 승인 사항 부적정

- 영동대교 B램프 측면 경계석 교체 공사 시공계획서 승인 부적정

․ 공사용 자재, 시방서 기준 등이 없음에도 시공계획서를 승인함으로서, 공사 품질 저하 우려.

- 서강대교 남단 육상구간 콘크리트 보수공사 착수 7일이 경과되었음에도 시공계획서 없이 공사가 진행되도록 방치.

․ 긴급공사의 경우 그 내용을 감리일지 등에 상세히 명시하여야함.

○ 업무일지 작성 부적정

- 서강대교 남단 육상구간 낙하물 방지시설 설치공사 감리업무를 수행하면서, 공사 제목만 기재하고 공사 위치 등 공사 내용은 기재하지 않아 공사 내용을 확인할 수 없도록 작성.

□ 조치계획

○ 점검 지적 사항은 감리업무를 불성실하게 수행하여 발생된 것으로

그 중 시공계획서 승인 부적정 사안은 공사 품질 저하에 직접적 원인이 될 수 있는 사안이나,

○ 현재 공사 착수 단계로 향후 개선의 여지가 충분하고, 해당 공사 내용도 경미하여 금회에 한하여 경고 조치하고,

○	향후 이와 같은 사안 재발생 될 경우 해당 감리원 교체 등 관련 규정에 따라 조치하고자 함.

끝.