투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계변경 계약의뢰(디지털3단지~두산길간 지하차도건설 기본 및 실시설계)

1. 우리본부에서 시행중인 「 디지털3단지~두산길간 지하차도건설 기본 및 실시설계용역」에 대하여 아래와 같이 설계변경 계약의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가.용역명 : 디지털3단지~두산길간 지하차도건설 기본 및 실시설계용역

나.계약금액 : 723,933,000원

다.계약자 : ㈜유신 대표  박찬식외 2개사

라.계약기간 : 2013. 5.24. ~ 2014. 5.23.

마.설계변경내용

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비고
계약금액	723,933,000	768,933,000	(증)45,000,000
용역기간	2013. 5.24.~2014. 5.23.	2013. 5.24.~2014. 8.30.

바.준공기한 연기사유 : 지반, 시험굴착 추가조사 및 협의기간 소요

사.예산과목 : 도시개발특별회계, 도시안전실도로계획과, 도로건설,

간선도로망확충(도시개발확충), 디지털3단지~두산길간지하차도

건설, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

붙임 : 1) 설계변경사유서 1부.

2) 준공기한 연기의뢰서 1부.

3) 방침서 각 1부.

4) 변경내역서 1부.

5) 합의각서 1부.

6) 품의서 사본 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이석근		토목설계과장	나상호		토목부장	05/21 노우성
협조자
시행	토목부-9709	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15(서소문동 37) 서울특별시청 서소문별관 2동 3층 도시기반시설본부 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2588	/전송	02-3708-2599	/	sttomog@seoul.go.kr	/	대시민공개