문서번호	시설관리과-7564
결재일자	2014.5.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	시설관리과장	강동수도사업소장
함인석	송종범	이계환	05/22 원응연
협 조
	급수운영과장		우종근

2014년 긴급누수복구 가상훈련 완료보고

2014. 5

강동수도사업소

시설관리과

누수복구(가상훈련) 완료 보고

송파구 방이동 167번지 방이초등학교앞 송배수관 D=1,000mm

누수발생(가상)에 따른 복구공사 훈련을 실시하고 결과를 보고함

누수 발생 현황

❍ 누수 일시 : 2014. 5. 19(월) 14:00

❍ 누수 위치 : 송파구 방이동 167번지 방이초등학교앞

❍ 누수 관종 및 구경 : 1979년 강관 D=1,000mm

❍ 누수 원인 :  노후로 인한 균열

❍ 누수 부위 : 관 하단 이음부

❍ 단수 세대 : 약 300가구(수계조절 후)

❍ 현장 출동자

- 수도사업소 : 사업소장 외 24명(수계전환, 단수홍보 및 급수지원, 수질요원 등)

- 복구 업체 : 12명(현장소장외 11명)

- 감 리 자 : 1명

- 유관기관 : 송파경찰서 차량1대, 강동구청 도로과 2명, 송파소방서 차량1대

누수복구 추진내용

○ 누수 발생(가상)	’14.5.19(월)	14:00
○ 현장도착 및 안전시설 설치		14:20 ~ 14:30
○ 누수관로 밸브잠금 및 수계조절		14:20 ~ 14:50
○ 터파기 완료 및 누수부위 확인		14:30 ~ 15:30
○ 단수홍보 및 급수지원		14:30 ~ 16:30
○ 누수관로 복구완료		15:30 ~ 17:00
○ 퇴수시행 후 수계환원, 잠금밸브 열음		17:00 ~ 17:30

장비, 자재 출동사항

❍ 현장 사무실(천막) 상황판 설치

❍ 차량 6대,  굴삭기 1대, 양수기 3대,  관절단기 2대 등

❍ 강관 용접장비 : 발전기, 산소절단기, 용접기, 용접봉 등

❍ 자재현황(D=300mm 대체시범) : 직관1본, 이음관, KP접합부속등

(D=600mm 대체시범) : 강관 및 용접기등

기타 사항

❍ 유관기관 참여 : 송파경찰서, 송파소방서, 송파구청 도로과

❍ 참관 강평 및 당부사항 전달 – 강동수도사업소장, 시설관리과장

- 누수복구 시 안전사고 없도록 현장관리 철저

- 유사 시 신속한 복구로 시민 불편없도록 사전준비 철저

- 사전 매뉴얼을 숙지하여 신속한 복구체계 유지

행정 사항

❍ 용접작업시 얼굴 손상 방지를 위해 전면 보안경 착용 지시 - 누수복구업체

❍ 가상훈련 실시결과 본부에 보고 - 누수복구담당

첨 부 : 가상훈련 현장 사진 1부.  끝.