문서번호	도시철도설비부-4653
결재일자	2014.5.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	차량과장	도시철도설비부장
정해철	임정규	05/22 정찬웅

9호선 2단계 구간 시운전 상황보고

(2014.5.21)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시철도설비부

9호선 2단계 연장구간 시운전 상황 일지

2014.5.21.(수)

□ 금일실적

급전	단전	시험시간
08:59	17:32	09:00~17:10

○ 시험 내용

- 신호 TDC 시험

· 927~928정거장 하본선/부본선 역방향 시험

· 926 ~ 927정거장(상선) 정방향 및 역방향 시험

· 926 ~ 928정거장(하선) 정방향 TDC측정

· 926~927정거장 하본선 역방향 진로(C3T) 궤도회도 점검-

※ S본드 : 15개, RB : 25개, 분기점 4개소 등

○ 참여인원 : 14명 (본부 : 6명 , 시공사 : 5명, 감리단 : 1명, 기관사 2명)

(상황실근무자 : 이용기, 김창환, 황영필, 정해철, 이진근)

□ 본선 출입승인

일자	구분	회사명	작업구간	작업내용	작업인원	비고
5/21	토목	경남기업	915공구 경계부	공구경계부 바닥청소	송문기외 6명
	이동통신	SKT	927~929정거장	케이블포설 및 Ant, 분배기, 장비설치	김상준외 31명

□ 5.22(목) 시험계획

○ 신호시험

- TDC(Track Data Checking) 시험

- 9296~930정거장 상하본선 정방향진로 측정

- 928정거장 C102T 궤도회로 점검. 끝.