문서번호	도시철도설비부-4687
결재일자	2014.5.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		신호과장	도시철도설비부장
윤창현		代윤창현	05/22 정찬웅
협 조
	송변전과장			김형기
	시설전기과장			박성우
	차량과장			代김기중
	설비계획과장			황철호
	설비공사과장			김호성
	정보통신과장			이용기

하남선(5호선 연장) 기본 및 실시설계용역

제1차 공정보고회 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5.

도시철도설비부

(신호과)

	하남선(5호선 연장) 기본 및 실시설계용역 제1차 공정보고회 개최결과 보고

우리 본부에서 추진중인 하남선(5호선 연장) 사업과 관련 시스템 및 E&M 분야 설계용역 통합 공정회의(1차) 실시 결과 보고임

■ 근거: 도시철도설비부-4132호(2014. 5. 2.) ｢하남선(5호선 연장) 시스템 및 기전분야 설계용역｣ 관리계획 수립

□ 회의개요

○ 회의내용 : 하남선 시스템 및 E&M 분야 설계용역 통합 공정회의(1차)

○ 참 석 자 : 총22명

- 본   부 : 송변전과장 외 11명

- 용역사* : 세종기술(김성욱 상무) 외 9명

* 세종기술→전기, 융도Eng→기계, 유신→통신, 정은테크→신호

○ 회의일시 : 2014. 5. 20.(화) 16:00~18:00

○ 회의장소 : 서울시청 남산별관(지하1층 회의실)

□ 회의내용

○ 회의내용

- 분야별 추진상황 보고 및 질의응답

○ 회의결과

- 공통사항

ㆍ도시철도공사와 충분한 협의 후 설계도서 작성

⇒ 협의 시 기록관리 철저 및 협의내용 보고

ㆍ정거장 E&M 분야 충실한 실시설계 필요

ㆍ신장비, 신공법, 신시스템 적용 등은 자문회의 개최 준비

ㆍ향후 통합공정회의에 차량, 운전운영 분야 참석 필요

- 송변전분야

ㆍ수전계통 조속히 확정할것

ㆍ연장선 준공시점은 기존 설비의 내구년한이 도래하는 시기임         ⇒ 도철과 협의하여 설계방향을 결정

- 전기분야

ㆍ조속히 전기부하를 확정할 수 있도록 타 공종 협조 필요

ㆍ중소기업제품 구매에 문제가 없도록 설계

ㆍ정거장 전기실 구성방식은 도철공과 협의하여 설계

- 차량분야

ㆍ차량과 운전운영이 토목에 포함되었으나 다음부터는 차량을 시스템에 포함하여 보고요망

- 기계분야

ㆍ설계 납품시기에 대한 검토와 다음 공정회의 때까지 구체적인 공정계획 제출

ㆍ자동제어는 기존시스템과 연계방안을 제시할 것

ㆍ신재생에너지를 의무적으로 적용할 사항인지 검토

- 신호, 통신분야

ㆍ발전속도가 빨라 기존 설비와 호환이 어려운 경우가 발생하므로 운영기관과 심도있는 협의 후 설계 요함

□ 회의전경

□ 향후계획

○ ‘14. 6. : 통합 공정회의 개최(2차)

따로붙임 : 회의 참석자 서명 1부. 끝.