투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	관급자재(도장형바닥재) 납품기한 변경의뢰

1. 납품요구번호 12-14-1-19832-00(2014.04.07)번과 관련입니다.

2.『2014 한강공원 야외수영장 보수공사』의 관급자재(도장형 바닥재)의 납품 기한을 아래와 같이 변경의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 납품요구번호 : 12-14-1-19832-00

다, 계   약   자 : 주식회사 한솔이앤씨

다. 계 약  일 자 : 2014. 04. 07

라. 납품기한 변경 내용

물품분류번호 (품 명)	납 품 기 한		사 유	비 고
	당 초	변경
30129997 (도장형 바닥재)	2014.05.30	2014.06.30	사용시기 미도래	물품식별번호 (22347218)

끝.

	기전설비2과장
주무관	김영찬		주무관	권혁제		기전설비2과장	05/22 김두석
협조자
시행	기전설비2과-2183	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개