투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	삼서건설주식회사 대표 나남열귀하
(경유)
제목	불량맨홀정비공사 작업조건 변경 지시

1. 삼건제14-13(2014.05.21.) 및 중랑경찰서 도로공사신고 접수번호 1120-2014-000077(2014.5.21.)호와 관련입니다.

2. 도로보수과-2180(2014.5.13.)호로 2차 작업지시한 내용중 중랑경찰서로부터 동일로, 망우로는 차량정체구간으로 주간공사 불가함이 통보되어

3. 작업조건을 야간작업으로 붙임 변경작업지시내역을  통보하오니 변경된 작업지시내역에 맞게 시공하시고 당초 공사기한내 작업완료보고서(사진첨부 : 전․중․후)를 제출하시기 바랍니다.

따로붙임  변경작업지시 내역서 1부. 끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	하승환		도로보수과장	05/22 국중진
협조자
시행	도로보수과-2358	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울특별시 성동구 자동차시장길 41(용답동) 성동도로사업소 도로보수과	/
전화	02-2210-1566	/전송	02-2210-1549	/	hsh1647@seoul.go.kr	/	대시민공개