문서번호	도시철도설비부-4711
결재일자	2014.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	차량과장	도시철도설비부장
정해철	임정규	05/23 정찬웅

9호선 2단계 구간 시운전 상황보고

(2014.5.22)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시철도설비부

9호선 2단계 연장구간 시운전 상황 일지

2014.5.22.(목)

□ 금일실적

급전	단전	시험시간
09:01	16:34	09:30~16:00

○ 시험 내용

- 신호 TDC 시험

· 928~930정거장 간 상본선 정방향/역방향 시험

· 928~930정거장 간 하본선 정방향/역방향 시험

· 930정거장 ATC업데이트 완료(분기기 및 궤도회로 1개소)

※ S본드 : 20개, RB : 23개, PSBa : 13개, PSBd : 10개, 분기점 4개소 등

○ 참여인원 : 14명 (본부 : 6명 , 시공사 : 5명, 감리단 : 1명, 기관사 2명)

(상황실근무자 : 박성우, 박규영, 정희석, 이진근)

□ 본선 출입승인

일자	구분	회사명	작업구간	작업내용	작업인원	비고
5/22	이동통신	SKT	927~929정거장	케이블포설 및 Ant, 분배기, 장비설치	김상준외 47명
		KT ens	927정거장	광케이블 포설	백승훈외 9명
			926정거장	광케이블 포설	조한영외 9명

□ 5.22(목) 시험계획

○ 신호시험

- TDC(Track Data Checking) 시험

- 930 분기기 4개 진로 측정

- 929~930정거장 상선 역방향진로 궤도 1개소 점검. 끝.