투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	설비부장
(경유)
제목	물품계약서 송부(장충체육관 리모델링 기계설비공사 에스컬레이터)

1. 설비부-5368(2014.05.21.)호와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 조달물품 납품기한 연기 요청에 대하여 아래와 같이 변경계약체결되었기에 물품계약서를 송부하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 장충체육관 리모델링 기계설비공사 에스컬레이터 구매

나. 변경계약체결 현황

구 분	당 초	변경	비 고
계 약 자	㈜새한트라비스엘리베이터 (######)	변경없음
계약금액	216,864,000원	변경없음
납품기한	2014.06.02	2014.08.31

붙 임 : 물품계약서 1부. 끝.

	건설총괄부장
주무관	이상일		경리과장	최영미		건설총괄부장	05/23 강홍기
협조자
시행	건설총괄부-9329	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문별관 2동3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2372	/전송	02-3708-2365	/	bestman@seoul.go.kr	/	부분공개