문서번호	방재시설부-3546
결재일자	2014.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
한종수		서관석	05/23 박종웅
협조
	조경시설과장		신용우

「용허리공원 빗물저류조 설치공사」준공기한 연기 검토 보고

2014.  5

서울특별시도시기반시설본부

『용허리공원 빗물저류조 설치공사」

준공기한 연기 검토 보고

우리본부에서 시행중인 「용허리공원 빗물저류조 설치공사」의 유지관리 부서인 서초구청에서 공연장 설치, 운동공간 조성, 수경시설 조성 등 요구사항이 있어 추가공사 시행으로 인한 절대공기 부족으로 공사(총차, 2차) 준공기한을 연기코자 검토 보고 드림.

1		관련근거

❍ 잠원2감 2014-142호(‘14.5.22) : 【공기연장 검토보고】

❍ 하천관리과-7068호(‘14.4.28) :【용허리 빗물저류조 공사 관련 협의 회시】

❍ 서초구청 공원녹지과-7507호(‘14.4.10) :【용허리공원 재조성사업 관련 협조 요청】

2		공사개요

❍  공 사 명 :「용허리공원 빗물저류조 설치공사」

❍  공사위치 : 서초구 서초동 1324-1(용허리 근린공원 일대)

❍  공사규모 : 빗물저류조 설치(저류용량 V=15,000㎥), 유입관로(2.0m×1.5m×1련, 246m)

❍  공사기간 : 2012.12.21 ~ 2014.5.30. (2차 : ‘13.04.16~’14.5.30)

❍  도 급 비 : 금7,625,521천원 (2차 : 4,831,766천원)

❍  시공사/감리사 : 케이월드종합건설(주) / (주)신명건설기술공사

3		검토내용

❍ 준공기한 연기사유

- 용허리공원 빗물저류조설치공사 시공 중 유지관리 부서인 서초구청에서 공연장 설치, 운동공간 조성, 수경시설 조성 등 요구사항이 있어 추가공사로 인한 절대공기 부족으로 공사(총차, 2차) 준공기한 연기

❍ 준공기한 연기내용

구 분	당 초	변 경	비 고
총 차	'12. 12. 21 ~ '14. 5. 30	'12. 12. 21 ~ '14. 9. 30	123일 연장
2차	'13. 4. 16 ~ '14. 5. 30	'13. 4. 16 ~ '14. 9. 30	123일 연장

❍ 귀책사유 및 지체상금 부과 여부

- 귀책사유 : 도시기반시설본부

- 지체상금 : 미부과

4		조치의견

❍ 상기 검토내용과 같이 추가공사로 인한 「용허리공원 빗물저류조 설치공사(총차, 2차)」의 준공기한 연기는 타당한 것으로 사료되어

❍ 계약부서에 공사(총차, 2차) 준공기한 연기를 의뢰하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1. 감리단 검토의견서 1부.

2). 준공기한 연기의뢰서 1부.   끝.