문서번호	방재시설부-3535
결재일자	2014.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김학지		서관석	05/23 박종웅
협조

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

토출관로 부력방지 검토 보고

2014. 5

도시기반시설본부

(방재시설부)

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

토출관로 부력방지 검토 보고

공릉2빗물펌프장 토출관로중 일부구간이 중랑천 수위상승시 부력에   대하여 취약한 것으로 판단되어, 부력에 대한 안전성검토 및 보강에 대한 서울시시설관리공단으로부터 현장실정 보고사항이 있어 이에 대한 검토 보고임.

사업개요

❍ 공 사 명 : 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

❍ 규    모

- 공릉2빗물펌프장 : 토출용량 Q=520㎥/분, 인입관거 412m

- 면목4동 배수관로 : 강관추진 52m, 배수관로 설치  380m

❍ 사업기간 : 2013. 1. 8 ∼ 2015. 6. 30

❍ 감리사/시공사 : 서울시시설관리공단/(주)승영기술공사외 1개사

❍ 도 급 비 : 5,365백만원

실정보고 내용

❍ 문제점

- 공릉2빗물펌프장 토출관로 중 일부구간이 중랑천 수위상승 시 부력에 대하여 취약한 것으로 판단되어, 부력에 대한 안전성 검토 및 보강이 필요한 실정임

- 부력검토

․ 위 치 : 공릉2빗물펌프장 토출관로(중랑천 고수부지)구간

․ 관종 및 관경 : 강관 1,500㎜ @ 2열, 24m

․ 부력에 대한 안전율이 0.6으로 보강이 필요한 상황임

- 안전성 및 보강검토

․ 부력 취약구간에 콘크리트(케이싱)을 타설하여 부력에 대한 안전율      (FS)이 1.2이상 되도록 보강(두께 t=20㎝로 타설시 안전율1.307)

※ 붙임 토출관로 부력검토서 참조

감리검토내용

❍ 설계사(도화엔지니어링) 의견조회(내용)

- 토출관로의 부력에 대한 안전성확보를 위하여 관로외곽에 최소 20㎝

두께로 콘크리트 보호공이 필요함(도화수자원-2014-A20-0312, 2014.5.19.)

❍ 공릉2빗물펌프장 토출관로 중 부력에 취약한 중랑천 고수부지구간(24m)에 부력방지 콘크리트(케이싱)를 타설하여 중랑천 수위상승시 부력에 대한 안전성을 확보

- 추가공사비 : 10,760천원(도급비 4,730천원, 관급비 6,030천원)

보고자 의견

❍ 상기내용을 검토한 결과 서울시시설공단 위탁감독이 제출한 현장실정 보고사항이 적합한 것으로 판단되어 승인조치하고자 함.

붙임 : 1. 현장실정보고 검토서 1부.

2. 토출관로 부력방지 검토서 1부.

3. 설계사(도화엔지니어링) 의견조회서 1부. 끝.