문서번호	토목부-9921
결재일자	2014.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목총괄과장	토목부장
최진우		김영수	05/23 노우성
협조

구조물(교각․교대) 지반조사 추가 검토 보고

《 월드컵대교 건설공사 》

2014. 5.

도시기반시설본부

토   목   부

구조물(교각․교대) 지반조사 추가 검토 보고

《 월드컵대교 건설공사 》

공사현황

◦ 공사규모 : 폭 31.4m(6차로), 연장 1,980m

◦ 공사기간 : 2010. 3. 22 ~ 2015. 8. 22

◦ 공 사 비 : 176,063백만원

◦ 시공사 및 감리단 : 삼성물산(주) 외 2개사, (주)포스콘엔지니어링 외 1개사

보고내용

◦ 관련근거 : 월드컵감리 2014-151호(2014. 5.22.)

◦ 교대 및 교각 구조물 지반의 상태를 확인하며 설계기준에 대한 적합 여부를 분석하기 위한 지반조사가 14개소만 반영되어 있음

◦ 구조물 기초 설계기준(건교부 2003. 3.) 에는 모든 교각 및 구조물에 시행토록 되어 있어 추가로 지반조사가 필요함

당 초	변 경	비 고
○ 북단 : 7개소 - Ramp-D 2개소 - Ramp-E 5개소 ○ 남단 : 7개소 - Ramp-A 5개소 - 깎기구간 2개소	○ 북단 : 21개소 - 접속교 8개소 - Ramp-D 7개소, Ramp-E 6개소 ○ 남단 : 34개소 - 접속교 7개소 - Ramp-A 5개소, Ramp-D 5개소 - Ramp-F 10개소, 지하차도 7개소	수상구간 주경간부 우물통 기초 구간 제외
총 14개소	총 55개소	증 41개소

관련규정

◦ 구조물 기초설계기준 (건설교통부제정 2003.3) : 보링은 교대 및 교각에 1개소씩 시행

◦ 공사시방서 제2장 측량 및 지반조사 2-2-1 시추조사

- 시추공의 간격 및 심도는 교대․교각마다 최소 1개소(설계지지층 밑으로 최소 연암

상단 1m 까지), 구조물 기초설계기준(건교부 제정)에 의거 실시하여야 한다

원설계자 의견

◦ 공사시방서에 지반조사를 명기하였으므로 발주처와 협의하여 추가 실시

감리단 검토의견

◦  월드컵대교 육상(남단,북단) 전구간 지반조사 실시 관련하여 구조물 설계기준 및 공사

시방서에 의거하여 당초 수량에 포함되지 않은 수량을 추가하여 공사 착공전 지반

조사를 실시하여 구조물 기초지반의 상태를 확인, 설계기준에 적합 여부를 분석이

필요함

(단위:천원)

공 종	단위	당 초		변 경		증 ․ 감		비고
		수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
지반조사	개소	14	68,257	55	268,154	41	199,897
제잡비			18,563		72,846		54,283
도급비			86,820		341,000		254,180

- 적용단가 : 기존 계약단가

조치계획

◦ 책임감리원이 제출한 구조물(교각․교대) 지반조사 추가 실정보고에 대하여 내용검토한

바 타당하기에 우선 시공토록 업무지시하고 추후 설계변경위원회 심의를 득한후 설계변경시

도급비에 반영하여 공사추진에 만전을 기하고자함.

- 추가공사비 : 254백만원

- 실 시공(토사, 풍화암, 연암 등)에 따른 정산 실시

붙임 : 관련 공문 1부.  끝.