투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	총무과장
(경유)
제목	「서울대공원 예방사방공사」관급자재 조달구매 납품기한 연기요청

1. 조경과-959(2014.2.27.)호와 관련입니다.

2. 『2014년 서울대공원 예방사방공사』소요 관급자재(레미콘) 납품기한을 아래와 같이 연기요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 2014년 서울대공원 예방사방공사 자재 조달구매

나. 계 약 일 : 2014. 3. 8

다. 납품기한 변경내역

식별번호	품 명	규 격	수량(㎥)	납품기한		업체명	비고
				당 초	변 경
10063091	레미콘	25-18-08	803.9	‘14.5.30	‘14.6.16	서울경인레미콘공업(협)

라. 연기사유 : 공사일정과 관급자재 소요시기를 고려하여 납품기한 연기

- 계약상대방(납품업체) 귀책사유 없음. 끝.

	조경과장
주무관	김성태		주무관	김흔진		조경과장	05/24 이성주
협조자
시행	조경과-2874	(		)	접수		(		)
우	427-080	경기 과천시 막계동 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr/
전화	02-500-7542	/전송	02-500-7993	/	kst2006@seoul.go.kr	/	대시민공개