함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	변경계약 의뢰(2013년 북부관내 건설폐기물 처리용역(장기계속단가계약)- 최종

1. 우리 사업소에서 서울시시설관리공단에 감독을 위탁하여 시행 중인 “2013년 북부관내 건설폐기물 처리용역(장기계속계약)”에 대하여 최종 정산결과 계약물량 공종별로 증,감이 발생되어 아래와 같이 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2013년 북부관내 건설폐기물 처리용역(장기계속단가계약)

나. 도 급 자 : 금강도시환경(주) 대표 이상훈

다. 계약기간 : 총부기기간 : 2013.05.14 ~ 2014.05.31. (변동없음)

라. 계약금액 변경

(전체분)

- 당초 금액 : 금177,569,000원

- 변경후 금액 : 금177,540,000원 (감29,000원)

(금차-2차분)

- 당초 금액 : 금 57,669,000원

- 변경후 금액 : 금57,640,000원 (감29,000원)

마. 설계변경 사유 : 공종별 용역물량 증,감 발생

바. 예산과목 : 상수도사업비, 영업비용, 급수공사비, 신설공사비

자본적지출, 가동설비자산, 구축물, 시설비

상수도사업비, 영업비, 배급수비, 수선교체비 및 기타예산

따로붙임 : 1) 변경설계 내역서(총차, 1차) 각 1부

2) 설계변경사유서 및 설계변경 심의결과 관련서류 각 1부

3) 서울시시설관리공단 설계변경 승인요청 및 관련공문서류 각 1부.

4) 합의서 1부.  끝

	북부수도사업소장
주무관	장관규		급수운영과장	05/26 김수영
협조자	주무관	정재풍
시행	급수운영과-10482	(		)	접수		(		)
우	142-060	강북구 한천로935(번2동377번지) 4층 급수운영과	/
전화	02)3146-3372	/전송	02)3146-3389	/	jgg21@seoul.go.kr	/	대시민공개