문서번호	시설보수과-1990
결재일자	2014.5.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
최태석		代최태석	05/26 정진오
협조

자문회의 개최결과 보고

[시조사삼거리 교차로구간 개선공사 실시설계용역]

2014. 5.

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

성동도로사업소

(시설보수과)

자문회의 개최결과 보고

[시조사삼거리 교차로구간 개선공사 실시설계용역]

우리 사업소에서 추진 중인 실시설계용역을 수행 함에 있어 분야별 설계방향 설정과 관련, 대안을 모색하기 위한 초기 자문회의를 개최한 결과 보고임

용역개요

❍ 용 역 명 : 시조사삼거리 교차로구간 개선(청량제1고가 성능개선 포함) 공사 실시설계용역

❍ 용역개요

도 로 명	구 간	도로폭원	차로수 (양방향)	규제속도	과 업 내 용	비 고
왕 산 로	청량리↔시조사	30.1	6	60㎞/h	1개 차로 추가 178m (보도육교 철거 포함)
망 우 로	시조사↔망우동	28.9	6	50㎞/h	1개 차로 추가 128m (고가 성능개선 포함)
이 문 로	시조사↔이문동	30.0	6	50㎞/h	선형 조정

❍ 용역기간 : 2014.04.03.~2014.09.29.

❍ 용 역 비 : 113,190천원

❍ 용 역 사 : ㈜유경기술단 외 1개사

자문회의 개최

❍ 일    시 : 2014.05.23(금) 15:00 ~

❍ 장    소 : 성동도로사업소 방촌당(2층)

❍ 자문위원  : 7명(외부위원 5명, 전차 진단용역 책임기술자 1명, 내부위원 1명)

❍ 주요 자문사항

- 청량제1고가 성능개선 관련 설계방향 설정

· 낙하물 방지공 구조물 설치

· 부분 철거 및 신설 단계별 교통처리 방안

· 시공 중 기존 교량의 안전성 검토

· 기존 교량 철거 및 신설 교량 설계 방안

- 기타 설계 관련 자문

자문회의 검토의견(요지)

❍ 교대에 대한 성능개선 방안 종합적인 검토 필요(내구성 및 지지력 등 확인)

❍ 시공 중 보도부 차도 사용에 대한 내하력 검토 및 보.차도의 단차처리문제

❍ 교량의 형하공간 기준 미달에 따른 종단계획 등 조정 검토 필요

❍ 상부구조 철거 시 사용차량의 위치 등을 고려하여 검토 필요(안전성 확보)

❍ 근접된 청량제2고가 시공내용을 참고하여 시공계획 수립 필요

❍ 낙하물방지공은 빔의 위치와 차량한계 등을 고려한 계획 및 철도관련 협의

❍ 고압전선이 지나는 철도 횡단 구간이므로, 제반 사항을 반영 검토

❍ 교량의 특성을 고려하여 교량길이 대비 거더높이를 1/25이하로 계획 필요

❍ 상부 슬라브 시공계획은 종방향 조인트 발생 문제로 PC제품 사용방법 검토

❍ 왕산로 확장에 따른 차선조정과 교통섬 간섭에 대한 검토(안전과 교통소통)

❍ 강재 동바리 설치 공간에 전도방지 대책수립

❍ 철거에 따른 절단 작업에 사용하는 물처리 대책수립

❍ 교통소통대책에 있어 ‘대안2’가 바람직

❍ 보도육교 철거 관련 보행 동선 및 여건 고려와 신호현시 최적화 방안 겸토

❍ 설계 착수단계에 주민의견 등 청취하여 방향 설정

❍ 인.허가 협의 관련 사항을 리스트 작성 추진할 필요성

❍ 철도구간인 점을 감안한 향후 유지관리 측면의 공법 및 시공방법 검토

❍ 현재 고가의 신축유간(거더와 교대흉벽) 부족한 바, 유간확보 필요

❍ 보도부 임시 차량통행은 버스보다 자가용 통행유도 및 주기적 점검 필요

조치 및 향후계획

❍ 제시된 자문의견에 대하여 용역사로 하여금 검토하여 설계에 반영 및 보완토록 조치하고자 하며,

❍ 교대부 성능개선 방안을 위하여 내구성 및 지지력 확인에 대한 방법을 검토, 별도 보고 후 조치방안 강구

❍ 철도횡단 시설물임을 감안하여 철도 관련기관에 협조공문 발송

붙임  1. 참석위원명단 및 자문의견서 1부.

2. 자문회의 현황사진 1부. 끝.