투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	디지털3단지~두산길간 지하차도건설 기본 및 실시설계 추진현황 알림

1.귀 청(부서)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2.우리본부에서 추진중인 「디지털3단지~두산길간 지하차도건설 기본 및 실시설계용역」과 관련으로 향후 공사시행 시 지하매설물 손괴사고 등으로 인한 안전사고를 예방하고 정밀한 실시설계 수행을 위해 과업구간내 지반 및 지하매설물 추가조사를 시행함에 따라 아래와 같이 용역기간이 연기되었음을 알려 드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가.용역명 : 디지털3단지~두산길간 지하차도건설 기본 및 실시설계

나,개  요 : 도로개설 B=8.7~12m, L=452m(지하차도 290	m)

다.과업기간

- 당초 : 2013. 5.24. ~ 2014. 5.23.

- 변경 : 2013. 5.24. ~ 2014. 8.30.

라.용역비 : 768,933천원

마.용역사 : ㈜유신, ㈜동일기술공사, ㈜일신이엔씨. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서 울 특 별 시 장(도로계획과장),금천구청장(도로과장)
주무관	이석근		토목설계과장	나상호		토목부장	05/26 노우성
협조자
시행	토목부-10075	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15(서소문동 37) 서울특별시청 서소문별관 2동 3층 도시기반시설본부 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2588	/전송	02-3708-2599	/	sttomog@seoul.go.kr	/	대시민공개