함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(2013년 북부관내 포장도로 굴착복구공사)-변경 4차

우리사업소에서 시행 중인 “2013년 북부관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)”에 대하여 최종 정산결과 공종별 계약물량 증·감 사유가 발생됨에 따라 아래와 같이 설계변경(최종 4차)을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2013년 북부관내 포장도로굴착복구공사(장기계속단가계약)

나. 계 약 자 : (주)엔에스이엔지  대표 박경준

다. 계약기간

- 총차 : 2013.05.08 ∼ 2014.05.30

- 금차 :  2014.01.01 ∼ 2014.05.30

라. 계약금액 변경사항

<총 부기금액 >

- 당초 : 금1,192,929,980원

- 변경 : 금1,190,695,000원 (감 2,234,980원)

<금차분 금액 >

- 당초 : 금288,300,980원

- 변경 : 금286,066,000원 (감 2,234,980원)

마. 설계변경 사유 : 최종정산결과 공종별 시공물량의 증·감 및 실 경비 반영에 따른 금액 변경

바. 예산과목

- 상수도사업비, 영업비용, 급수공사비, 수선교체비, 기타교체비

- 상수도사업비, 영업비용, 급수공사비, 신설공사비

- 상수도사업비, 영업비용, 배급수비, 수선교체비, 기타교체비

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비

따로붙임 :   1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경내역서 (총차분 최종4차, 금차분) 각1부.

3. 설계변경심의 결정서 1부. 끝.

주무관	장관규		급수운영과장	김수영		북부수도사업소장	05/26 이종백
협조자	주무관	정재풍		주무관	한경란		계약2팀장	홍연화
시행	급수운영과-10518	(		)	접수		(		)
우	142-060	강북구 한천로935(번2동377번지) 4층 급수운영과	/
전화	02)3146-3372	/전송	02)3146-3389	/	jgg21@seoul.go.kr	/	대시민공개