문서번호	도로보수과-4874
결재일자	2014.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		도로보수과장
권세봉		05/26 이규철
협 조
	주무관		김영용

2014년 교통안전(도로)부속물 유지보수공사

추가 작업지시 관련 보고(제2차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  5. 26(월)

서부도로사업소

(도로보수과)

2014년 교통안전(도로)부속물 유지보수공사

추가 작업지시 관련 보고(제2차)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2014년 교통안전(도로)부속물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2014. 03. 27 ~ 2015. 02. 28

○ 시 공 사 : 해마건설(주) 대표 송흥섭

○ 도 급 비 : 65,368,000원

□ 보고내용

○ 서대문구 금화터널 앞에서 발생한 교통사망사고 지점에 대하여 2014.04.16. 2차 작업지시하여 2014.05.13. 작업완료하였으나 현장 재조사한 바 도심방향 금화터널입구 교통사고 위험이 있어 방호울타리 추가(2경간) 설치가 필요하며, 또한 화단 앞 초입부에 운전자 시인성 향상을 위하여 태양광 경보등을 보완 설치코자 함.

- 제2차 작업지시(도로보수과-3567, 2014.04.16)

- 제2차 작업지시 완료(도로보수과-4417, 2014.05.13)

▸위    치 : 서대문구 성산로(신촌동 1-208 금화터널 앞)

▸설치시설 : 방호울타리(도로중앙분리대-쓰리에스), 태양광 경보등

▸설치수량 : 방호울타리 연장6m, 태양광 경보등 1개

□ 조치계획

○ 상기와 같이「교통사망사고지점 시설개선」계획에 따라 교통안전(도로)부속물 방호울타리를 설치완료 하였으나 교통사고 위험이 있어 방호울타리 및 경보등을 추가설치하여 교통사고 예방에 기여코자 하며,

○ 교통사망사고지점 시설개선으로 기 배정된 예산(교통운영과-4610, 2014.03.06.)을『교통안전(도로)부속물 유지보수공사 제2차 작업지시』에 포함하여 시행하고자 함.

- 건  명 : 교통안전(도로)부속물 유지보수공사 추가 작업지시(제2차)

- 작업위치 : 서대문구 성산로(신촌동 1-208 금화터널 앞)

- 작업기간 : 2014. 05. 27 ~ 2014. 06. 10

- 필요금액 : 약 1,316,000원(시공 물량에 따라 추후 정산)

- 공종 및 물량

공 종	규 격	수 량	비 고
가드레일 설치(야간)	3,000×900	2 경간
태양광 경보등 설치	1구, 쏠라	1 개소

○ 도급비 집행 현황

(단위 : 천원)

공사명	도급비	기 집행액	금회 집행액 (2차)	집행잔액
교통안전(도로)부속물 유지보수공사(연간단가)	65,368	52,202	1,316	11,850

붙 임 : 1. 추가 작업지시 내역서(제2차) 1부.

2. 위치도 및 현황사진 각 1부.  끝.