투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	용허리 빗물저류조 설치공사 폐기물처리용역 준공기한 연기 시행 및 의뢰

우리 본부에서 시행하는 「용허리 빗물저류조 설치공사 폐기물처리용역」에 대하여  아래와 같이 준공기한 연기를 시행코자 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 「용허리 빗물저류조 설치공사 폐기물처리용역」

나. 용역금액 : 금37,871,620원

다. 용역기간 : '13. 2. 1~'14. 5. 30

라. 용 역 사 : ㈜해솔산업개발 대표 유 길 문

마. 준공기한 연기사유 : 시설공사 준공기한 연기에 따른 폐기물처리용역 연기

바. 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
폐기물처리용역 준공기한	'13. 2. 1 ~ '14. 5. 30	'13. 2. 1 ~ '14. 9. 30	증)123일

1). 연기에 따른 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

2). 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1). 준공기한 연기 검토보고서 1부

2). 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	한종수		방재시설과장	서관석		방재시설부장	05/26 박종웅
협조자	경리과장	최영미
시행	방재시설부-3653	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 별관2동 2층 (서소문동 37)	/
전화	02 - 3708 - 8772	/전송	02 - 3708 - 8756	/	ggabii@seoul.go.kr	/	대시민공개