문서번호	급수운영과-10542
결재일자	2014.5.27.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장		북부수도사업소장
김종필토	이승완	김수영		05/27 이종백
협 조
	주무관		정기성

급수공사(단가계약) 발주계획

(2014년 노원구 관내 급수공사)

2014. 5.

북부수도사업소

(급수운영과)

급수공사(단가계약) 발주계획

“노원구 관내 급수공사”는 관내에서 발생하는 각종 급수민원(신설, 개량, 교체장애, 불용관 정비 등)을 처리하는 계속 및 반복적으로 시행하는 단가계약 대상사업으로 현재 시행중인 2013년 연간단가계약이 금년도 6월말 종료됨에 따라 향후 지속적이고 원활한 급수민원 처리를 위하여 장기계약공사로 발주코자 함.

□ 발주대상

○ 공 사 명 : 2013년 노원구 관내 급수공사(장기계속단가계약)-2차

○ 공사기간 : 2014 .1. 8 ~ 2014. 6. 30

○ 공사처리 범위 : 노원구 관내 공릉동외 4개동 상수도공사

□ 계약방법

○ 계약방법 : 장기계속단가계약으로 발주

※ 관련근거 : 국가를당사자로하는계약에법률 제21조(장기계속계약)

○ 단가계약의 장기계속계약시행 방법

- 총 예정물량은 장기계속계약 절차에 따라 2011~1013년까지 3개년 평균치를 산출하여 전체 설계물량으로 하고

- 2014년도 12월31일까지의 예정물량과 2015년도 6월 30일까지의 예정물량을 구분 산출하고 각 연도별 총 소요예산도 구분하여 발주

○ 2015년도 6월 30일까지 집행할 2차년도 예정량에 대하여는 회계연도 개시시 계약 요구

□ 계약기간 : 계약일로부터 2015. 6. 30일까지

○ 2014년도 계약기간(1차수) : 계약일로부터 2014. 12. 31까지

○ 2015년도 계약기간(2차수) : 2015. 1. 1 ～ 2015. 6. 30까지

(2015년도 신규계약 체결 시까지)

□ 장기계속계약공사 발주내역

단위 : 백만원

연번	용 역 명	용 역 기 간	총공사 규모		1차년도 (착공일～2014.12.31)		2차년도 (2015.1.1～6.30)
			물량	금액	물량	금액	물량	금액
1	2014년 노원구 관내 급수공사	착공일 ～ 2015.6.30	D=13~300mm L=2,489m	758	D=13~300mm L=1,620m	498	D=13~300mm L=869m	260

끝

□ 세부추진일정

○ 공사계약 심사요청 : 2014. 5. 26 (사업소 → 본청 계약심사과)

○ 심사결과 통보 : 2014. 5. 29 (본청 계약심사과 → 사업소)

○ 공사발주 및 계약의뢰 : 2014. 5. 30 (사업소 → 본청 재무과)

○ 공고 및 공사계약 : 2014. 6. 1~21 (본청 계약심사과 21일 소요)

○ 공사착공 : 2014. 6. 23.  끝.