문서번호	도시철도설비부-4788
결재일자	2014.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	차량과장	도시철도설비부장
정해철	임정규	05/27 정찬웅

9호선 2단계 구간 시운전 상황보고

(2014.5.26)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5.

도시철도설비부

9호선 2단계 연장구간 시운전 상황 일지

2014.5.26.(월)

□ 금일실적

급전	단전	시험시간
09:32	17:48	13:00~17:30

○ 시험 내용

- 신호 TDC 시험

· 928 정거장 하선 부본선 역방향진로 측정

· 928 정거장 하선 본선 정/역방향 측정

※ S본드 : 6개, RB : 4개, PSBd : 2개, 분기점 4개소 등

· 928 신호기계실 C1T궤도회로 SDTC 모듈 점검

○ 참여인원 : 17명 (본부 : 6명 , 시공사 : 7명, 감리단 : 1명, 기관사 2명, 운영사1)

(상황실근무자 : 김영하, 배종수, 김현철, 정해철, 이진근)

□ 본선 출입승인

일자	구분	회사명	작업구간	작업내용	작업인원	비고
5/26	신호	서울시	926~930구간	신호 사용전검사 (철기연 박종민외 8명)	신호과주관	09:00~18:00
5/24	이동통신	kTens	927거장	광전케이블 포설	백승훈외 9명	22:00~ 익일06:00
			929정거장	안테나 설치	석상식외 9명
		SKT	926~930	케이블포설, 안테나, 분배기설치	김상준외 47명	20:00~ 익일06:00

□ 기타 특이사항

○ 전동차 김포 차량기지 출고 : 10:00

※ 2단계 시험구간 진입 : 10:57

→ 11:00 ~ 12:00 : 시운전 차량 준비(CUC 보드 등)

□ 5.27(화) 시험계획

○ 신호시험

- TDC(Track Data Checking) 시험

· 928  하선 본선/부본선 역방향진로 측정

· 926 상본선 역방향진로 측정

· 928 신호기계실 C3T궤도회로  TWC ~ SDTC 결선라인 점검. 끝.