함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신	경기도 남양주시 시릉로 20 좋은 인상프라자 301호(금곡동402-4) 다양조경개발(주) 대표이사 양승진 귀하
(경유)
제목	제초작업 및 조경관리용역 1차작업기간 연장

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 조경관리용역작업(1차)중 토끼풀 제거작업 등의 작업량 증가 및 인력작업으로 많은 시간이 소요되어 당초 작업기한내 작업이 불가할 것으로 판단되어 아래와 같이 작업기간을 연장조치하오니 연장기한내 모든 작업이 완료될 수 있도록 적극 협조해 주시기 바라며,

3. 작업내용은 작업구간별 실제작업 물량으로 산출하여 정산처리 하고자 하오니 상세한 작업지역 표시 및 물량을 산출하여 작업 전, 중, 후 사진과 함께 제출해 주시기 바랍니다.

가. 당초작업기간 : 2014. 05. 09 ~ 05. 27

나. 변경작업기간 : 2014. 05. 09 ~ 06. 10 .끝.

	광암아리수정수센터소장
주무관	김우승		정수시설과장	05/27 김창현
협조자
시행	정수시설과-897	(		)	접수		(		)
			/
전화		/전송		/		/	대시민공개