과 장		05/27 이성주		팀 장	윤희숙	심사자	김성태	설계자	조진성	설 계	심 사	결 재
										2014년 5월	2014년 5월	2013년 10월
변 경 설 계 서(제4회)
	공사명 : 백두산호랑이숲 조성공사(총차)
	구 분					금 액					증 감		비 고
	총 공 사 비					금2,446,640,330원					143,000,000		당초 / 변경
						금2,589,640,330원
	도급액		공 급 가 액			금2,161,102,727원					130,000,000
						금2,291,102,727원
			부 가 가 치 세			금216,110,273원					13,000,000
						금229,110,273원
			계			금2,377,213,000원					143,000,000
						금2,520,213,000원
	관급자재대					금69,427,330원					-
						금69,427,330원
공사개요 - 위치 : 서울대공원 맹수사일대 - 규모 : 외부방사장 조성 2,704㎡, 관람로조성 1,329㎡, 건축리모델링 432㎡, 격리수용책 596㎡ 등 - 기간 : 2012.12.27 ~ 2014.5.29 (장기계속공사)