문서번호	설비부-5648
결재일자	2014.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
변인수		조예환	05/27 박기형
협조

관급자재(CCTV) 납품기한 연기 검토 보고

(송정 외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사)

2014.  5.

도시기반시설본부

(설  비  부)

관급자재(CCTV) 납품기한 연기 검토 보고

(송정 외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사)

송정 외 1개소 빗물펌프장 증설공사 관련, 선행공종(토목, 건축) 지연에 따른 관급자재(CCTV) 납품기한 연기에 대한 검토 보고임.

관련 공문

□ CCTV 납품기한 연기 검토 보고[동화 C14-46호(2014.05.27.)]

사업개요

□ 사 업 명 : 송정 외 1개소 빗물펌프장 CCTV 구매

□ 납품기한 : 2014. 03. 04 ~ 2014. 05. 28

□ 계약금액 : 금73,240,000원

□ 계약업체 : ㈜그린아이티코리아

실정보고 내용

□ 준공기한 변경내용

공 종	납품기한		비 고
	당 초	변 경
CCTV	2014. 05. 28	2014. 07. 20	계약금액 변동없음

□ 연기사유 : 선행공종(토목, 건축) 지연에 따른 CCTV 설치시기 미도래

□ 지체상금 부과 여부 : 미부과(납품사 귀책사유 없음)

조치의견

□ 송정 및 사근빗물펌프장 펌프실 증축공사 지연으로 CCTV 납품기한 연기가 불가피 함.

□ 납품기한 변경내용에 대해 계약부서인 건설총괄부에 연기의뢰 코자 함. 끝.