문서번호	현장민원과-5703
보존기간	년
결재일자	2014.5.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		현장민원과장
정영환		05/27 김회중
협 조

2014년 소형 수도계량기 교체 공사 발주 계획

2014. 5

강남수도사업소

현장민원과

2014년 소형 수도계량기 교체 공사 발주 계획

상수도사업본부 『2014년 수도계량기 점검 및 교체 민간위탁 추진계획』에 따라 강남수도사업소 수도계량기 교체 공사(단가계약) 발주를 추진하여 업무에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		근거 및 추진경위

□ 추진근거 : 2014년 수도계량기 점검 및 교체 민간위탁 추진계획

(상수도사업본부 고객지원과-1825)

□ 민간위탁근거

○ 서울시 수도조례 제47조(계량기 점검 및 교체 등 업무위탁)

○ 서울시 수도조례 시행규칙 제65조(위탁업무)

□ 추진경위

○ 2014년 수도계량기 점검 및 교체업무 민간위탁 추진계획(ʼ14.05.19)

○ 수도계량기 교체 민간위탁 용역 원가조사(‘14.03.28 ~ 05. 07)

○ 용역설계서 계약심사 의뢰(계약심사과-8097, ‘12.05.18)

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : ‘14년 강남수도사업소 관내 소형 수도계량기 교체 공사

□ 공사지역 : 강남구, 서초구

□ 공사내역

계	만기계량기	동파계량기	야간 및 휴일 교체	디지털계량기교체	폐전 철거	보온재 교체	동절기 상황근무
17,171전	9,751전	2,243전	723전	580전	2,874전	1,000전	240일

□ 공사기간 : 2014. 07. 01 ~ 2015. 06. 30 (1년)

□ 소요예산

○ 공 사 비 : 400,278천원(도급비)

○ 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 민간위탁대행사업비(수도계량기 교체)

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선교체비(역류방지밸브 설치)

Ⅲ		공사발주 계획

□ 계약방법 : 일반공개경쟁(연간단가계약)

□ 계약부서 : 서울특별시 재무과

□ 입찰공고기간 : 7일

○ 차수별 계약시행

- 1차수 : ‘14. 07. 01 ~ 12. 31

- 2차수 : ‘15. 01. 01 ~ 06. 30

Ⅳ		향후 추진계획

□ 공사계약 일상감사 의뢰 : ‘14. 05. 28(수)

□ 서울시 재무과 계약의뢰 : ‘14. 06. 04(수)

□ 계약업체 선정 : '14. 6월 중순

□ 공사착공 일자 : '14. 07. 01

Ⅴ		첨 부

□ 공사발주 용역설계서 및 공사시방서 각  1부.   끝.