문서번호	교량보수과-1638
결재일자	2014.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	성동도로사업소장
김근섭		김종대	05/27 정진오
협 조
	주무관			이기승
	주무관			김중철
	주무관			김형섭

2014 상반기 정기 하자검사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

성동도로사업소

(교량보수과)

2014 상반기 정기 하자검사 계획

우리과에서 유지관리하는 하자담보기간내에 있는 시설물 및 보수 공사 등에 대한 2014년 상하반기 정기 하자검사 계획 보고임

관련근거

❍ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조(하자검사)

❍ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제69조

❍ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조

하자검사 개요

❍ 검사기간 : 2014. 6. 2 ~ 6.13

❍ 검 사 자 : 시설물 담당자, 필요시 시공사 합동점검

❍ 검사대상 : 27건 (시설물 6건, 공사 21건)

- 하자기간내 시설물 : 영동대교 북단램프E,광진교, 성수대교,

- 공사 : 2013 동호대교 보수공사 외 21건

❍ 검사방법

- 2인 1조 검사

- 하자만료기간 만료 14일 이내에 있는 대상은 정기검사와 최종하자검사 병행실시

- 도보 및 육안점검에 의한 시설물 하자 유무 판단

하자검사 추진계획

❍ 담당별로 2014. 6.13까지 하자검사 완료

⇒ 하자검사 조서 작성하여 하자업무 총괄담당에게 제출

❍ 하자 발생사항에 대한 시설물 담당자별 시공사에 하자보수 요청 시행

⇒ 하자보수 관리부 작성 및 비치.

❍ 하자검사 및 하자보수 업무 추진 흐름도

하자검사 (하자검사 부서)	⇒	하자발생 (하자검사조서작성)	⇒	하자보수요청 (관리부서→시공사)	⇒	하자보수 시공계획서 제출 (시공사→관리부서)	⇒
보수계획서 검토 (관리부서→시공사)	⇒	착공계 제출 (시공사→관리부서)	⇒	하자보수시행 (시공사)	⇒	준공계 제출 (시공사→관리부서)	⇒
하자보수 준공검사 (관리부서, 검사)

❍ 하자담보책기간 만료되는 공사는 최종(하자)검사 해당시설물 담당자 실시

- 시공사 사전에 유선 통보하여 시공사 입회하에 검사하고 입회 거부시 담당자 직권으로 실시

- 시설안전자문단 등 외부전문가 활용 검사 실시

․ 3분기 주요 시설물 하자대상건 : 영동대교 남단 자전거연결로 설치공사

❍ 한강교량 일상유지보수 및 자동차전용도로 시설물 일상유지보수 공사 연간단가로 시행한 보수는 시설물 담당자가 점검시 하자발생 유무 확인하여 수시 하자보수 시행(※ 공사위치 한강교량 일상유지보수 백서 등 활용)

행정사항

❍ 하자검사 후 담당자별로 하자검사조서 및 하자검사관리부 작성

❍ 하자발생시 시설물 담당자별로 하자보수 조치

첨부  1. 2014 상반기 정기하자검사 대상현황 및 검사자 지정 1부.

2. 하자검사조서 및 하자검사관리부 양식 1부.

3. 하자검사 관련 법령 1부.

4. 일상유지보수공사 보수자료 1부(별도 담당자에게 메일 송부).  끝.