투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시교통방송
수신자	기획조정실장
(경유)
제 목	tbs 교통방송 방송장비 구매 및 이전 설치 변경계약 의뢰

1. 기술국-5137(2016.7.4)호와 관련 입니다.

2. 우리 교통방송 “tbs 교통방송 방송장비 구매 및 이전 설치” 사업에 대하여 실시설계 후 부득이 장비납품 세부내역에 변경사항이 발생하여 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 사업명 : tbs 교통방송 방송장비 구매 및 이전 설치

나. 계약자 : 씨제이올리브네트웍스 콘소시엄

- 공동수급체대표사(89%) : 씨제이올리브네트웍스(주)

- 공동수급체구성원(11%) : (주)글로벌텔레콤

다. 계약기간 : 2016.04.06. ~ 2016.11.02

라. 계약금액 : 금12,470,000,000원

마. 변경 계약 사유 :

○ 당초 계약시 세부 납품 내역 중 일부 단종 장비 발생

○ 라디오 및 TV 방송시스템 실시설계 후 비효율적 시스템구성 장비 변경

○ 우리 교통방송 방송환경에 최적의 방송시스템 구성을 위한 일부 시스템

구성 장비 변경

바. 계약 변경 내용

○ 세부 납품내역 중 일부 내역 변경

- 첨부 설계변경내역서 참조

○ 계약금액 및 기간 변경없음

사. 예산과목 : 교통방송 기획조정실, 방송운영 및 관리, 방송시설 및 장비관리,

교통방송청사이전, (사무관리비, 자산및물품취득비, 전산개발비, 시설비)

*붙임 : 1. 『tbs 교통방송방송장비 구매 및 이전 설치』 계약 변경 계획 1부.

2. 설계 변경 내역서 1부.

3. 산출 내역서 1부.

4. 합의각서 1부.

5. 변경장비 비교자료 1부.   끝.

	기술국장
기술관리팀장	김응석		기술관리부장	손재달		기술국장	07/05 변동운
협조자	주무관	김경화		재무팀장	이계홍
시행	기술국-5195	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 36 교통방송	/	http://www.tbs.seoul.kr
전화	02-311-5511	/전송	02-311-5519	/	chamion@seoul.go.kr	/	부분공개(5)