함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	공사현장 실정보고에 대한 회신

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 공사감독2처-7518(,14.05.28)호와 관련 우리사업소에서 발주하고 귀 공단에서 감독하고 있는“연건동188-106번지외 1개소 세척갱생관정비공사”공사현장에서 발생된 현장실정보고에 대한 검토를 완료하고 회신하오니 시공에 만전을 기 하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 연건동188-106번지외 1개소 세척갱생관정비공사

나. 공사기간 : 2014.04.09 ~ 2014.10.5

라. 도 급 자 : ㈜효엘엔지니어링  대표 박소정

마. 감 독 청 : 서울시시설관리공단

바. 회신내용.

연번	시설관리공단 실정보고		회신내용
	공사실정	조치의견
1	공사구간은 당초A-1두께=20cm 로 되었으나 관로굴착결과 기존ASP포장두깨기가 T=30 ~40cm로 확인되고 도로관리 청의 허가조건이 1.2m로서 포장깨기 및 폐기물량이 증 가 되는 실정임.	증가되는 포장깨기 물량은 추 후 설계변경시 반영코자 하며 폐기물 처리는 용역업체에 처 리토록 조치코자 함.	아스콘포장두께가 당초 설계된T=20cm 에서 포장두께가 T=30cm ~ 40cm로 변경시공에 따른 깨기 물량증가는 추후 설계변경시 반영하시고 폐기물 처리는 폐기물처리 용역업체에서 처리토록 조치하여 시공에 만전을 기 할 것.

끝.

	중부수도사업소장
주무관	이생기		시설관리팀장	최명익		시설관리과장	전결 05/28 나태산
협조자
시행	시설관리과-14062	(	2014.5.28.	)	접수		(		)
우	100-856	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	02)3146-2199	/전송	02)3146-2239	/		/	부분공개(6)